			공동주택관리 지원사업 추진 요령 및 절차 안내
Ⅰ. 추 진 요 령
	공 통 사 항
		○ 당초 우리시에 제출한 사업계획 내용에 적합하게 사업을 하여야 하며 사업계획내용과 다르게 사업을 할 경우에는 사전에 군산시장의 승인을 받아야 합니다. ○ 단지당 보조금 지원금액은 2천만원으로, 초과되는 사업비는 자부담하여야 하며 사업계획이 변경되어 사업 추진이 불가능 할 경우에는 사업포기서를 제출하여야 합니다.
	사업착수 전 해야할 사항
		○ 주요 사업(도장, 방수, 포장 등)을 기준으로 군산시 소재 건설업체와 계약을 하여야 합니다. ○ 시공업체와 계약시는 민간건설공사 표준도급계약서에 의해 계약하여야 합니다. - 계약시 하자담보 책임기간, 하자보수 보증금액 명시 ○ 사업 착수전에 우리시 건축과에 착수신고를 하여야 합니다. - 착수신고시 제출서류 ∙착수신고서 1부(별지서식) ∙시공자와의 도급계약서 사본 1부(설계서 및 내역서 포함) ∙우리시 경관전문가 검토 승인을 받은 색채계획안 1부(도장공사만 해당) - 특히, 미관지구에 해당될 경우에는 지구단위계획 색체계획표에 맞추어야 함 ※ 도장공사의 경우 도시계획과 도시디자인계 박신 담당자와 미리 색채계획을 협의한후 색채를 결정하여 공정에 차질 없도록 하시기 바랍니다.
	사업착수 및 공사시행시 해야할 사항
		○ 공사 시행시 안전관리 및 정리정돈을 잘하여 입주민의 피해가 없도록 시공자를 지도하시기 바랍니다. - 입주민의 출입이 많은 곳은 안전 조치후 시공하도록 시공자 지도
							군 산 시 건 축 과 ☎ 450-4474

		○ 입주민 중에 건설공사에 경험이 있는자를 감독으로 임명하며 품질이 좋은 자재를 사용하여 양질시공을 하도록 시공자를 지도하시기 바랍니다. ○ 공사 전･중･후로 구분하여 같은 장소ㆍ방향에서 촬영하여 사진첩을 제작하시기 바랍니다.(제출용)
	공사완료 후 해야할사항
		○ 공사가 완료되면 공사현장을 깨끗이 청소 및 정리하고, 점검을 마친 뒤 이상이 없을때 구비서류를 첨부하여 보조금 지급 신청을 하여야 합니다.
	보조금 청구시 구비서류
		○ 보조금청구서 1부.(별지서식) ○ 시공 전･중･후 사진첩 1부. ○ 공사완료확인서 1부. ※ 입주자대표회가 있는 경우에는 대표회의 공사완료확인서 1부. ※ 입주자대표회의가 없는 경우 입주민의 2/3이상 공사완료확인서 1부. ○ 정산내역서(증빙자료 첨부) 1부. ○ 보조금 수령자 통장사본 1부. ※ 시공업자 위임시 위임장 및 피위임자 통장사본 첨부
	보조금 지급 방법
		○ 사업신청자 또는 보조금 수령 피위임자 통장계좌로 입금 - 사업량이 축소 되었거나, 사업비가 감소한 경우에는 교부 결정한 보조금을 감액하여 지급 할 수 있습니다.
	기타 문의 사항 연락처
		○ 사업추진중 궁금한 사항은 군산시 건축과 주택관리계 담당자 : 박상열 ( ☎ 450-4474,6249 ) ○ 도장공사관련 문의사항은 군산시 도시계획과 도시디자인계 담당자 : 박신 ( ☎ 450-6258,6529 )
								군 산 시 건 축 과 ☎ 450-4474

Ⅱ. 추 진 절 차
		공동주택지원사업 신청 ( 입주자대표 → 군산시 )				○ 구비서류 - 사업신청서 1부 - 입주자대표회의 의결서 1부 - 사업계획서(내역서 또는 견적서포함) 1부
지원단지결정절차
		▼
		사업신청단지중 지원대상단지 결정 (군산시공동주택지원심사위원회)
		`▼
		지원대상단지 확정 및 보조금 교부결정 통보 ( 군산시 → 입주자대표 )
		▼
		시공업체와 계약 및 사업 착수신고 ( 입주자대표 → 군산시 )				○ 착수신고시 제출서류 - 착수신고서 및 시공자와도급계약서 각1부 - 도장공사시행단지는 우리시 경관전문가와 색채계획 검토 ※ 시공업체는 군산소재 건설업면허업체로 해야 함
지원단지사업추진절차
		▼
		사업착수 및 공사추진 ( 입주자대표 , 시공자 )
		▼
		사업완료후 보조금 청구 ( 입주자대표 → 군산시 )				○ 보조금 청구시 제출서류 - 보조금 청구서 - 시공 전･중･후 사진첩 1부 - 공사완료확인서 1부 - 정산내역서 (증빙자료 첨부) 1부
		▼
		사업완료사항 확인 ( 군산시 → 입주자대표 )				○ 보조금 지급방법 - 사업신청자 계좌로 지급
						군 산 시 건 축 과 ☎ 450-4474