정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

▣ 등록번호 : 2025-39

① 정책사업명	농업 근로자 기숙사 건립 지원사업
② 추진배경	농업 분야 근로자 기숙사 건립 지원사업을 통한 농업 근로자 주거 안정으로 농촌 고용인력 확보
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2025 ~ 2027 ❍ 사업위치 : 대야면 지경리 778-10, 718-1 ❍ 총사업비 : 24억원(국 12, 도 3.6, 시 8.4) ❍ 사업규모 : 부지 1,666㎡, 연면적 660㎡(지상2층/40명 수용) ※ 건축기획 및 실시설계 과정 중 사업규모 변동 가능 ❍ 사업내용 : 농업분야 외국인계절근로자 공동숙소 신축
④ 사업부서	농업정책과		⑤ 담당자	김상기 농업정책과장 류동희 농촌인력팀장 임은아 주무관
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2025 ~ 2027년
<그간 주요 추진내용>
○ 지방건축위원회(소위원회) 심의 (공공건축심의) (결과 : 조건부 의결)		‘26.03.27.	군산시 건축경관과
○ 지방건축위원회 해체심의 (결과 : 조건부 의결)		‘26.03.10.	군산시 건축경관과
○ 농업 근로자 기숙사 건립 부지 내 양수기창고 철거공사 시행		‘25.11. ~ ‘25.12.	황관선 소장 김미정 과장 황용택 팀장 한재근 주무관
○ 농업 근로자 기숙사 신축부지 철거공사 실시설계용역 시행		‘25.11. ~ ‘26.04.	황관선 소장 김미정 과장 황용택 팀장 한재근 주무관
○ 농업 근로자 기숙사 건립 건축기획 용역 시행		‘25.11. ~ ‘26.04.	황관선 소장 김미정 과장 황용택 팀장 한재근 주무관
○ 농업 근로자 기숙사 부지 폐기물처리용역 시행		‘25.11. ~ ‘25.12.	황관선 소장 김미정 과장 황용택 팀장 한재근 주무관
○ 농업 근로자 부지 석면 해체공사 시행		‘25.11. ~ ‘25.12.	황관선 소장 김미정 과장 황용택 팀장 한재근 주무관
○ 주민수용성 확보 - 주민의견청취공고(8.12.~26.) - 마을이장간담회(8.18.) - 주민설명회(8.28.) - 자치위원설명회(9.17.)		‘25.08. ~ ‘25.09.	황관선 소장 김미정 과장 황용택 팀장 한재근 주무관
○ 공유재산관리계획동의안 (농업 근로자 기숙사 건립)		‘25.08.27.	군산시의회(행정복지위원회)
○ 지방재정투자심사(자체) (결과 : 조건부가결)		‘25.07.30.	군산시 기획예산과
○ 공유재산관리계획(취득)심의 (농업 근로자 기숙사 건립)		‘25.07.29.	군산시 회계과
○ 농업 근로자 기숙사 신축 변경계획 (농업정책과-17360호)		‘25.07.14.	강임준 시장 김영민 부시장 황관선 소장 김미정 과장 황용택 팀장 임은아 주무관
○ 농업 근로자 기숙사 신축 추진계획 (농정과-544호)		‘25.01.08.	강임준 시장 김영민 부시장 황관선 소장 정기호 과장 박경남 계장 황용택 주무관