2026년 생활자원회수센터 확충·현대화사업 공모 추진

- 공공재활용선별장 시설개선사업 -

< 공모개요 >

❍ (공 모 명) 2026년 생활자원회수센터 확충·현대화사업

❍ (공모분야) 환경(폐기물처리시설) 분야

❍ (주관부처) 환경부

❍ (사업주체) 군산시

❍ (사업기간) 2026. 2. ~ 4. (3개월)

❍ (사업비 구조) 국비 30% / 시비 70%

❍ (추진근거) ｢공공재활용기반시설 설치·운영 지침｣ Ⅲ. 공공 재활용기반시설 설치기준 제3호(공공 재활용기반시설 구성설비의 설치기준), ｢재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침｣ 제10조(공공 재활용기반시설 확충), 제15조(분리수거량의 조사·보고·공표 등)

공모 추진일정

‘25. 3. 7.		‘25. 3. 25.		‘25. 5. 30.		‘25. 9. 10.		‘26. 2월~4월
예산안 신청	➜	예산요구서 제출	➜	예산요구서 제출	➜	예산확정 통보	➜	사업추진
군산시		전북지방환경청		환경부		기획재정부		군산시

□ 추진배경

❍ 군산시 공공재활용선별시설 실시설계(‘18.5.) 및 환경부「투명페트병 별도 분리배출제」시행(‘20.12.) 시기 간극으로 선별시설의 투명페트병 선별라인 반영 누락

❍ 환경부「투명페트병 별도 분리배출제」확대(’21.12.)*, 투명페트병 회수 실적 관리 강화 등 재활용 선별 고도화 및 재활용 배출 증가에 따라 추가시설 확보 필요

*(기존)공동주택 ⇒ (확대)공동주택 및 단독주택

□ 사업개요

❍ (사 업 명) 『공공재활용선별장 시설개선사업』

❍ (사업기간)  2026. 2. ~ 2026. 4. (3개월)

❍ (사업예산)  600백만원[국비(30%) 180, 시비(70%) 420]

❍ (사업위치)  새만금북로 630-28 폐자원에너지화시설내 환경자원시설

❍ (사업내용)

(단위: 천원)

구분	산출내역	사업비	비고
파봉기 설치	□ 산업용분리기(파봉기)	379,000	조달구입
압축기 설치	□ 투명 PET 압축기: 170,000 □ 투입호퍼 신설: 7,500 □ 투입컨베이어: 15,000 □ 기초패드: 7,500	200,000	제작
설계용역비	□ 압축기 공사비의 7.06%	15,000	폐기물처리시설 국고보조금 업무처리지침
감리용역비	□ 압축기 공사비의 2.26%	4,500
시설부대비	□ 압축기 공사비의 0.72%	1,500
계		600,000

□ 기대효과

❍ 시설 도입에 따른 선별인력 재배치로 수선별(투명페트) 작업량 증가

❍ 파봉시스템 자동화에 따른 작업자 안전 확보

❍ 추가 시설 확보를 통한 재활용 배출량 증가 대응

❍ 지자체 합동평가 지표(투명페트병 분리수거량) 목표 달성

□ 금후계획

❍ 사업예산신청(군산시→전북도→전북지방환경청)	: ‘25. 3. 25.한

❍ 기재부 예산확정 및 2026년 시 예산 반영	: ‘25. 9월

❍ 파봉기 구입 및 압축기 설치	: ‘26. 2. ~ 4.

붙임1		군산시 공공재활용선별장 운영현황

❍ 시설현황

- 위    치: 군산시 새만금북로 630-28

- 운영기간:‘21. 3. 2. ~‘36. 3. 1. (가동개시후 15년)

- 위탁운영: 군산그린에너지센터(주)

- 주요내용: 생활폐기물 및 압축베일 소각, 재활용선별시설 운영

구 분	시설명	시 설 개 요
폐자원 에너지화시설 (민간투자사업)	환경에너지시설 (소각시설)	• 용량: 220톤/일(24시간/일, 315일/년 운전) • 형식: 연속연소식 스토커식
	환경자원시설 (재활용 선별시설)	• 용량: 20톤/일(7시간/일, 261일/년 운전) • 선별방식: 수선별+자동선별 - 수선별(투명페트, 알루미늄캔, 종이) - 자동선별(플라스틱류, 철캔, 비닐)

❍ 재활용품 반입현황

구분	반입량(톤)	1일 반입량(톤)	선별률(%)	비고
2021년	3,789	17.42	27
2022년	5,239	20.07	50
2023년	5,557	21.29	63
2024년	6,291	24.10	61

❍ 투명페트 요일수거제 운영(2024.9.~)

품목별	수거차량	변경 전	변경 후
플라스틱, 페트, 비닐, 캔금속류	압축차량	월 ~ 토	월 ~ 수, 금 ~ 토 (목요일 수거×)
유리병, 종이박스	진개덤프 차량	월 ~ 토	변경없음
스티로폼	진개덤프 차량	월 ~ 토	변경없음
종량제 마대	압축차량	월 ~ 토	변경없음
매립용 마대	압축차량	월 ~ 토	변경없음
투명페트병	압축차량	목요일 수거 (공동주택)	목요일 배출 및 수거 (군산시 전역)

붙임2		공공 재활용기반시설 설치·운영지침(2022. 12. 20. 개정)

Ⅲ. 공공 재활용기반시설 설치기준

3. 공공 재활용기반시설 구성설비의 설치기준

나. 선별설비

5) 재활용가능자원의 품목별 선별설비 중 자동화 선별이 가능한 경우는 자동화 선별설비를 우선하여 검토하되 현장여건을 충분히 고려하여 설치하며, 판매수요를 감안하여 재활용가능자원의 품목별 품질을 높이기 위한 선별ㆍ포장ㆍ보관방안을 계획하고, 현장여건에 맞추어 선별로봇 등 관련 신기술 도입을 적극 고려한다.

6) 플라스틱류를 선별할 경우에는 광학으로 선별할 수 있는 자동화 선별설비를 갖추어야 하며, 처리용량에 따라 다음 각 호의 설치수량(계열)을 고려하여 설비를 설치하여야 한다.

가) 일 처리량 10톤 미만 : 해당없음

나) 일 처리량 10톤이상 : 선별대상 플라스틱(PE, PP, PS, PET 등)류를 모두 선별할 수 있도록 1계열 이상 설치 (이때, 1계열이란 하나의 컨베이어벨트에 PE, PP, PS, PET 등 복합 품목을 모두 선별할 수 있는 광학선별기를 설치한 것을 말한다. 하나의 컨베이어벨트에 광학선별기를 여러 대 설치한 경우 설치 대수에 상관없이 1계열로 본다)

7) 무색PET병을 고품질로 재활용할 수 있도록 별도 선별설비를 구축하거나 요일제 운영 등의 방법으로 별도 선별하여야 한다. 다만, 무색PET병을 식품용기로 재활용하기 위해서는 「식품용기 사용 재생원료 기준」에 따라 무색 PET 재질 식음료병 이외의 플라스틱(다른 재질의 플라스틱, 혼합수거한 PET병 및 병모양이 아닌 PET를 포함한다)과 혼합되지 않도록 무색PET병 전용 별도 보관ㆍ선별ㆍ압축시설 등을 구축하여야 한다.

다. ~ 바. 생략