	군산 해양 모빌리티 AX 혁신허브 구축사업

□ 사업목적

❍ 군산 산업단지 내 중소기업 특화 AX(인공지능 전환) 전환을 위한 지원 인프라 구축

❍ AI기반 산업 고도화를 통해 기업의 생산성 향상과 신사업 기회 창출

□ 사업개요

❍ 선정여부 : 선정

❍ 사 업 명 : 군산 해양 모빌리티 AX 혁신허브 구축사업

❍ 사업기간 : 2025. ~ 2028.

❍ 위    치 : 군산시 오식도동 515-18번지 일원

❍ 사 업 비 : 25,200백만원(국 14,000 도 2,130 시 4,970 민간 4,100)

❍ 사업내용 : AX종합지원센터, 제조 AI 오픈랩, AX 가상공장 실증플랫폼,

SaaS 제조 AI 서비스, AX 마스터플랜 및 협력 체계 구축

▪AX 종합지원센터 : 군산산업단지 내 AI 및 디지털 전환 지원 제조 AX거점 역할

▪제조 AI오픈랩   : AI 솔루션 및 디지털 트윈 등 제조 AX 체험환경 조성

▪AX 가상공장 실증플랫폼 : 제조공정 분석, 현장 모니터링, 가상 시뮬레이션 등 AI 솔루션 지원

▪SaaS 제조 및 AI 서비스 : AX 클라우드 플랫폼, 기업별 맞춤형 sLLM, SaaS 서비스 제공

❍ 시행기관 : 산업부, 전북자치도, 군산시, 군산대, 전북대, 한국조선

해양기자재연구원[주관]

❍ 공모부처 : 산업통상부

□ 추진사항 및 금후계획

❍ 해양 모빌리티 기업대상 AX 지원 수요조사            : ‘25.6.~7.

❍ 전국 스마트그린산단 대상「AX실증산단 구축사업」공모선정 : ‘25. 8.

❍ AX 마스터 플랜 수립 및 클라우드 플랫폼 장비 심의   : ‘25.12.~

❍ 제조 AI 오픈랩 테스트베드 설계 및 착공	: ‘26.上.

❍ 수요기업의 AX 수준 진단 및 컨설팅 수행, 협의체 운영   : ‘26.1.~

❍ 공장 AX 기초데이터 수집, 해석 AI 솔루션 개발 지원   : ‘26.3.~12.

❍ 기업 맞춤형 AI 언어모델 개발 및 지원	: ‘26.3.~‘28.12.