관리번호		군산 상상도서관 건립
2-7

주관부서		도서관관리과장	도서정책계장	담당자
도서관관리과		황은미(☏5610)	최지선(☏5621)	이효정(☏5626)

사업유형		완료시기				사업주체					총사업비(백만원)
신규	계속	임기내		임기후		국가	전북도		자체		계		국비		도비	시비	기타
〇				〇			〇		〇		17,430		-		6,552	10,878	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야						이행단계									조례 마련 필요	전년도목표달성	추진율
필요 여부	제도		재정		권한	완료		이행후 계속		정상 추진		일부 추진		기타
X												〇			X	X	30%

□ 공약목표

❍ 서남부 지역의 생활SOC확충으로 지역주민의 생활편의 및 지식정보요구 해소

❍ 전연령 이용 가능한 교육문화 인프라 확충으로 지역주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 사업위치: 군산시 지곡동 도시공원 예정지 내

❍ 사업기간: 2023 ~ 2027

❍ 사업규모: 연면적 4,000㎡ (지상 4층 이내)

❍ 사 업 비: 금17,430백만원 (도 6,552 시 10,878)

- 공사비 15,600백만원 설계ㆍ감리 1,470백만원 기타사업비 360백만원

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
계	17,430	-	9,330			55	900	8,375	8,100
도비	6,552	-	3,312	-	-	-	-	3,312	3,240
시비	10,878	-	6,018	-	-	55	900	5,063	4,860

□ 추진계획

❍ 추진방향

- 지역특수성과 다양성 및 새로운 문화기술과 트렌드 반영한 건립 추진

- 제로에너지 및 재생에너지 건축물 지향 및 ICT기술 활용한 인문친화적 공간 조성

❍ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전검토 및 부서협의 계획수립
건축기획용역 및 사전행정절차
설계용역 실시
공사 착공

❍ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공사 착공	식	착공	-	사전검토 부서협의	사전행정 절차이행 용역비확보	용역추진 행정절차이행 예산확보	설계공모	공사착공

□ 추진실적

❍ 예산 관련 협의 및 계획 수립	: 2023. 1.
❍ 의회 간담회 추진(건립계획 보고)	: 2023. 2.
❍ 지곡동 주거지역 내 정주여건 조성 협조 요청	: 2023. 11.
❍ 제260회 군산시의회 제2자 정례회 의원 5분 발언 검토보고	: 2024. 1.
❍ 지곡동 일원 도시공원 예정지 내 도서관 건립 협의산림녹지과	: 2024. 2.
❍ 도서관 건립 건축기획용역 발주 및 관계부서 회의	: 2024. 5.
❍ 공약사업명 변경	: 2024. 5.
- (당초)은파호수공원 어린이상상도서관 / (변경)군산 상상도서관
❍ 군산 상상도서관 건립 건축기획용역 1차 보고회	: 2024. 8.
❍ 의회 간담회 추진(건축기획용역 보고)	: 2024. 8.
❍ 건축기획용역 중지	: 2024. 9.
❍ 2024년 정기3차 지방재정투자삼시 재심사 완료조건부 추진	: 2024. 10.
❍ 도서관 건립 관련 시민 의견 설문조사 실시	: 2024. 12.
❍ 설문조사 결과보고	: 2025. 2.

□ 주민소통실적

❍ 주변 학교, 아파트 등 시민 대상 설문조사 실시:‘24. 12. ~‘25. 1.

→ 접근성 좋고, 자연 친화적으로 맞춤형 문화ㆍ편의시설인 도서관 조속 건립 희망

- 응답자(2,023명), 조사내용(상상도서관 관련 사항)

□ 문제점 및 대책

❍ 도서관 검토부지(안)에 대한 의회 협의 및 사전행정절차 이행 가능

- 공유재산심의회(4월), 공유재산 관리계획(취득) 동의안 상정(6월)

❍ 공원 조성계획 변경 협의(산림녹지과) 및 대상지 내 부지 매입 관련

- 사유지(2025년내 매입), 국유지(시장님 → 빠른 매입ㆍ예산반영 지시)

□ 향후계획

❍ 공유재산심의회	: 2025. 4.
- 지곡동 도시공원 예정지 내(지곡동 산102번지 일원)
❍ 공유재산 관리계획 의회 의결	: 2025. 6.
❍ 공원조성계획 변경 관련 산림녹지과 협의	: 2025. 7.
❍ 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축 심의	: 2025. 9.
❍ 건축기획용역 완료	: 2025. 9.
❍ 기본 및 실시설계 예산 확보	: 2025. 하반기
❍ 도시공원 예정지 내 사유지 매입 완료(산림녹지과)	: 2025. 하반기
❍ 도서관 신축 설계 공모	: 2026. 상반기
❍ 도비 신청 및 건립예산(공사) 확보	: 2026. 하반기
❍ 건립공사 착공	: 2027. 상반기