관리번호		새만금 기업(미래)성장센터 건립
3-6

주관부서		기업지원과장	기업유치계장	담당자
기업지원과		이득만(☏2720)	이길란(☏2731)	주민지(☏2733)

사업유형		완료시기				사업주체					총사업비(백만원)
신규	계속	임기내		임기후		국가	전북도		자체		계		국비		도비	시비	기타
〇				〇					〇		32,000		16,000		4,800	11,200	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야						이행단계									조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율
필요 여부	제도		재정		권한	완료		이행후 계속		정상 추진		일부 추진		기타
〇			〇									〇			X	〇	35%

□ 공약목표

❍ 새만금 산업단지 내 이차전지 등 잇따른 앵커기업 입주증가에 따른 소규모 창업 및 기술력을 갖춘 R&D 기업의 입주공간 제공

❍ 기업지원시설 및 근로자를 위한 문화·서비스시설 공간 제공

※ 공약사업명 변경 : 군산 4차산업 지식산업센터 건립 → 새만금 기업(미래)성장센터 건립[산업혁신과-3371(2024.05.30.)호]

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2024 ~ 2027년

❍ 사업위치 : 새만금산업단지 5공구 내

❍ 사 업 비 : 320억원(국 160, 도시 48, 시비 112)

❍ 사업규모 : 부지면적 14,500㎡ / 연면적 12,500㎡(지상3층)

❍ 사업내용 : 기업 맞춤형 생산공장 및 근린복합시설 구축

- (생산공간) 혁신 기술을 가진 중소기업 및 스타트업 기업 등의 성장지원 기반

- (근린시설) 입주기업‧근로자의 생활여건 개선 위한 편의시설 및 기업육성 시설

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
계	32,000	-	19,100	-	-	-	1,120	17,980	12,900
국비	16,000	-	8,070	-	-	-	490	7,580	7,930
도비	4,800		2,439				129	2,310	2,361
시비	11,200	-	8,591	-	-	-	501	8,090	2,609

□ 추진계획

❍ 추경예산 확보(지방비) 및 공공건축 사업계획 검토 등 행정절차 이행

❍ 새만금 기업성장센터 건립공사 설계용역 추진

❍ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
건립부지 확보 및 타당성조사 용역
건립지역 확정 및 예산 반영
센터 건립

❍ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
기재부 적격성 심사		여/부		여
타당성조사 용역	1식	여/부			여
건립지역 확정 및 예산 수립		여/부
센터 건립 착공 및 준공	진행률	여/부

□ 추진실적

❍ 새만금개발청 지자체 보조사업 적격성 심사 통과	: `23. 7.

❍ 2024~2028년도 중기지방재정계획 반영	: `23. 9.

❍ 2024년 제3차 중앙투자심사 대상사업 제출	: `24. 7

❍ 센터 건립 기본계획 및 운영방안 연구용역 추진	: `24. 8.~

❍ 센터 건립 기본계획 및 운영방안 연구용역 착수/중간보고회	: `24. 9./ `24.12.

❍ 2024년 제3차 중앙투자심사 결과(재검토)	: `24. 10.

❍ 2025년 새만금기업성장센터 국비예산 확보(4.9억원)	: `24. 12.

❍ 2025년 제1차 중앙투자심사 대상사업 제출	: `25. 1.

□ 향후계획

❍ 센터 건립 기본계획 및 운영방안 연구용역 최종보고회	: `25. 4.

❍ 2025년도 추경예산 확보(지방비)	: `25. 上

❍ 새만금 기업성장센터 건립 설계용역 발주	: `25. 下

❍ 새만금 기업성장센터 공사 착공	: `26.~