□ 주요 투자사업 추진현황

우리 군산시에서 ‘24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후
조촌동 행정복지센터 청사 신축공사	9,254	121	2,575	6,538	20	2025	2022	44
시청~운동장간 도로개설공사	43,000	1,621	2,858	2,000	36,521	2030	2015	20
신덕~개정마을 도로확포장	5,200	2,584	733	883	1,000	2026	2018	60
신풍동 소방도로개설	3,500	1,800	300	100	1,300	2026	2018	80
지방도 709호선 확포장공사	27,900	25,900	1,000	1,000	-	2025	2018	95
옥서면 농어촌도로 304호선 확포장	8,000	2,466	1,200	400	3,934	2026	2019	70
공항로 기반시설 설치 및 정비사업	15,000	14,100	900	-	-	2025	2020	90
4토지~리츠프라자 호텔 도로개설 및 확장	41,000	11,508	5,700	4,661	19,131	2026	2020	65
나운3동일원 도로개설 및 확장공사	3,200	216	1,500	-	1,484	2026	2021	30
고군산군도 내부도로 (무녀선)확포장 공사	4,000	2,975	584	-	441	2026	2016	50
고군산군도 내부도로 (신시선)확포장 공사	7,700	4,020	500	200	2,980	2027	2023	60
고군산군도 내부도로 (장자선)확포장 공사	6,900	4,000	300	1,100	1,500	2025	2017	80
선유3구 남악마을 도로확포장공사	6,600	2,400	1,600	-	2,600	2027	2018	25
군도6호(석화~고척) 도로확포장공사	3,200	1,398	1,802	-	-	2025	2019	100
옥구면도 105호(옥정마을) 도로확포장공사	2,700	1,150	200	200	1,150	2027	2019	10
옥도리도 203호 도로확포장공사	2,600	400	500	200	1,500	2025	2019	50
회현리도 210호 도로확포장공사	3,700	2,350	-	-	1,350	2025	2019	80
옥산 리도 206호선 도로확포장공사 (대려~금성)	4,000	150	300	-	3,550	2027	2020	10
대야 삼라교 재가설공사	3,972	3,475	496	-	-	2025	2014	100
서수리도 206호 (외무장)도로확포장공사	3,120	200	1,000	-	1,920	2027	2020	5
동백대교 경관 조명 설치공사	4,000	4,000	-	-	-	2024	2021	100
가로등 에너지 절감 LED 교체 사업	3,900	300	900	900	1,800	2027	2023	54
고령자 복지주택사업	22,041	21,487	93	119	342	2024	2019	100
상권활성화사업 (구도심상권르네상스)	8,000	6,600	1,400	-	-	2025	2019	100
이차전지 기업 역량강화 지원사업	3,000	3,000	-	-	-	2025	2023	100
전북 군산 강소연구 개발특구 육성사업	24,965	17,350	3,450	4,165	-	2026	2021	80
전북군산 미래형 상용 모빌리티 소부장 지원센터 구축사업	19,660	4,750	4,890	4,910	5,110	2026	2023	75
산업단지 복합문화센터 건립사업	9,474	9,243	231	-	-	2024	2019	100
농공단지 에너지관리시스템 기술도입모델사업	2,450	-	1,725	725		2025	2023	95
조선기자재기업 신재생에너지 업종전환 지원	29,700	28,750	950	-	-	2024	2019	100
초대용량 풍력발전시스템 혁신연구센터	8,372	1,319	1,229	1,456	4,368	2028	2023	40
재생에너지 디지털 트윈 및 친환경교통 실증연구기반 구축사업 (국도비 직접지원)	168,062	111,619	32,592	23,851	-	2025	2022	50
해상풍력 산업지원센터 구축사업 (국비 직접 지원)	47,700	35,600	12,100	-	-	2025	2020	40
군산시 수소충전소 보급	6,000	6,000	-	-	-	2025	2021	10
해상풍력 단지개발 지원사업	6,558	4,800	1,758	-	-	2025	2022	50
진포예술제	498	122	122	124	130	계속	2022	100
상주사 불교 문화체험관 건립	3,000	0	3,000	-	-	2025	2023	80
은적사 전통 문화체험관건립	5,000	0	300	4,700	-	2026	2023	20
2024 군산 문화유산야행	585	0	585	-	-	2024	2021	100
해상 인도교 스카이워크 조성	3,200	3,000	200	-	-	2024	2019	100
제2차 대표관광지 육성사업	6,700	2,469	598	2,173	980	2026	2019	50
금강호 국민여가 캠핑장 조성사업	2,400	86	2,313	-	-	2024	2021	100
비응마파지길 관광명소화사업	3,500	104	633	2,763	-	2025	2021	50
군산시 선셋드라이브 명소화사업	6,600	-	411	630	5,559	2026	2023	10
월명산 달빛마루 관광자원화 사업	5,000	-	70	145	4,785	2026	2024	10
월명산전망대 및 관광객 쉼터조성	9,135	1,790	-	3,549	3,796	2026	2024	10
K-관광섬 육성사업	11,500	80	541	6,043	4,836	2027	2024	8.1
2024년 군산짬뽕페스티벌	630	180	150	150	150	계속	2023	100
소룡동 도시재생뉴딜사업	14,000	8,351	1,218	4,431	-	2025	2023	85
구암동 취약지역 생활여건 개조사업	2,870	1,842	761	-	-	2024	2020	100
삼학동 취약지역 생활여건 개조사업	3,509	234	315	2,119	-	2025	2021	30
선양동 취약지역 생활여건 개조사업	3,820	171	506	1,065	2,078	2026	2022	45
서군산 복합체육센터 건립사업	28,000	23,100	4,900	-	-	2024	2019	100
군산새만금국제 마라톤대회	3,790	880	900	1,110	900	계속	2024	100
군산새만금국제철인 3종경기대회	1,274	260	494	260	260	계속	2024	100
금석배전국 학생축구대회	3,460	900	840	860	860	계속	2022	100
새만금 전국 인라인마라톤대회	780	220	200	180	180	계속	2022	100
KPGA 군산오픈 골프대회	436	112	112	100	112	계속	2022	100
전국스포츠 클라이밍대회	530	140	130	130	130	계속	2023	100
국제 및 전국대회 개최 지원	816	164	216	211	225	계속	2022	100
신역세권 공영주차장 조성	2,012	-	1,709.5	302.5	-	2025	2023	85
군산시 광역해양 레저체험 복합단지 조성사업	38,690	11,792	11,728	15,170	-	2025	2022	85
말도~방축도 인도교 설치사업	33,970	33,970	30,520	3,450	-	2025	2015	90
섬마을 단위 LPG시설 구축사업	3,597	1,807	1,700	90	-	2025	2022	80
어촌정주어항 (무녀1구) 건설	9,500	9,500	-	-	-	2024	2015	100
선유1구 어촌 뉴딜 300사업	3,907	3,907	-	-	-	2024	2019	100
장자도 장자어화 어촌뉴딜 300사업	14,441	14,441	-	-	-	2024	2020	100
노을과 가락의 섬 비안도 어촌 뉴딜 300사업	12,173	12,173	-	-	-	2024	2020	100
두리도항 어촌 뉴딜 300사업	6,300	6,300	-	-	-	2024	2021	100
서래포구 어촌 뉴딜 300사업	10,460	10,460	-	-	-	2025	2021	75
야미도 어촌 뉴딜 300사업	10,630	5,422	5,208	-	-	2026	2022	25
명도 경사식 선착장 조성사업	6,000	1,400	3,600	1,000	-	2025	2023	35
어촌신활력 증진사업 (무녀도,신시도,야미도)	10,000	1,000	1,000	3,650	4,350	2026	2023	20
어촌신활력 증진사업 (선유도,장자도,대장도,관리도)	10,000	1,000	1,000	3,650	4,350	2026	2023	20
어촌신활력 증진사업 (유형3-관리도항)	5,000	650	1,449	2,901	-	2026	2023	30
새만금 수산식품 수출가공 종합단지 해수 인·배수 기반 조성사업	16,126	246	1,168	7,507	7,205	2026	2022	33.4
새만금 스마트 수산가공 종합단지 조성사업	43,339	8,124	-	7,940	27,275	2026	2022	40
새만금 수산식품단지 기반시설 조성사업	4,056	-	439	3,617	-	2026	2023	13.2
새만금 수산식품단지 공동배출 정화시설 조성사업	3,000	-	-	3,000	-	2026	2023	23.4
저온·친환경 위판장 현대화사업	6,000	-	218	2,700	3,082	2026	2024	70
수산물종합센터 건어매장 신축	2,370	2,370	64.2	800	-	2025	2024	50
수산물 직거래장터	200	-	140	30	30	계속	2023	100
수산물 온누리상품권 환급행사	130	-	130	-	-	2024	2023	100
군경합동묘지 안장묘역 확장사업	2,935	286	2649	-	-	2025	2023	100
군산시 승화원 제4추모관(봉안당) 신축	10,552	9,670	882	-	-	2024	2018	100
생활SOC복합화 군산시가족센터 건립	8,045	642	3,707	3,696	-	2025	2022	49
청소년수련관 기능보강사업	5,058	1,506	1,380	1,954	-	2025	2022	80
군산 상상도서관 건립사업	17,430	55	0	0	17,375	2027	2024	30
청암산 에코라운드 조성사업	7,200	4,582	259	338	-	2025	2015	95
월명공원 조성을 위한 사유토지 매입	28,000	13.927	2,722	6,330	5,021	2027	2021	59.5
군봉공원 조성을 위한 사유토지 매입	27,000	13,435	2,420	6,006	5,139	2027	2021	58.7
공원 사유토지 매입	41,000	18,438	10,047	10,515	2,000	2027	2018	69.5
군산 철길숲 조성사업	20,000	1,454	11,010	7,536	-	2025	2022	60
군산시 성산면 산곡지구 농촌공간정비사업	13,400	-	670	5,326.5	7,403.5	2028	2024	5
2024 군산 수제맥주 페스티벌	490	465	490	480	500	계속	2024	100
군산 꽁당보리축제	136	68	68	108	150	계속	2024	100

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업의 추진현황은【별지 10】과  같습니다.

우리 군산시에서 ‘24년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

□ - 2 지방채 발행사업

우리 군산시에서 ‘24년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 3 민간투자사업

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2024년	2025년	2026년 이후
BTL	군산시 하수관거정비 임대형민자사업	푸른군산 지키미	163,972	106,362	7,757	8,372	41,481	`11.6.30. ~ `31.6.29.
BTO	전라북도 환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업	㈜전북 엔비텍	91,053	62,498	6,361	6,103	16,091	`08.6.25 ~ `28.6.24
BTO	폐자원 에너지화시설 민간투자사업	군산그린 에너지센터(주)	215,298	31,259	13,003	13,234	157,802	`21.3.2. ~ `36.3.1.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2024년까지는 집행액(결산기준),
2025년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

군산시 하수관거정비 임대형민자사업

담당자

하수과 이설웅(☎454-5463)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새만금 담수호 유입 수질개선 및 서해연안의 수질보전을 위하여 새만금

유역 5개 처리장(대야,서수,임피,회현,옥서) 처리구역과 군산하수처리장

처리구역의 하수관거 정비로 하수처리 효율 증대 및 수질 개선 효과기대

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘11. 6. 30. ~ ‘31. 6. 29

○ 위    치 : 나운, 수송, 옥서, 옥구, 서수, 임피, 대야, 회현면 일원

○ 민간사업자 : 푸른군산지키미 주식회사

○ 총사업비 : 163,972백만원(임대료 128,272 운영비 35,700)

○ 사업규모 : 하수관로 정비 114㎞, 배수설비, 모니터링시스템 1식

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	163,972	106,362	7,757	8,372	41,481
국 비	88,589	60,855	4,266	4,696	18,772
시 도 비	3,968	2,715	191	201	861
시군구비	71,415	42,792	3,300	3,475	21,848
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영중

□ 향후계획

○ 하수관거 정비 BTL 사업지역 운영 관리 및 성과평가 시행

사업명

전라북도 환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업

담당자

하수과 두반석(☎454-5492)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 새만금 유역(만경강) 수질개선을 위한 공공하수처리시설 확충 및 운영

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 전라북도 환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업

❍ 협약체결일 : 2004. 8. 3.

❍ 공사기간 : 2005. 6. 25. ~ 2008. 6. 24.

❍ 위    치

처리장명	대야하수처리장	옥서하수처리장	서수하수처리장	회현하수처리장	임피하수처리장
위 치	대야면 석화들길 178	옥서면 옥구저수지로 205-40	임피면 탑천로 248-37	회현면 회미로 196	임피면 수반들길 49-4
처리용량(㎥/일)	1,900	1,600	950	550	550

❍ 민간사업자 : ㈜전북엔비텍

❍ 총사업비 : 41,214백만원

□ 재정부담 현황

❍ 계약조건

- 무상사용기간 : 2008. 6. 25. ~ 2028. 6. 24.(20년)

- 기준사용료 : 고정사용료 1,171백만원/년, 변동사용료 820.7원/톤

❍ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	91,057	62,498	6,361	6,103	16,091
국 비
시 도 비	8,190	6,300	420	420	1,050
시군구비	82,867	56,198	5,941	5,683	15,041
기 타

□ 추진단계(운영 중)

❍ 운 영 사 : 환경관리주식회사(수탁사 : ㈜전북엔비텍)

❍ 위탁기간 : 2008. 6. 25. ~ 2028. 6. 24.(20년)

❍ 운영인원 : 21명(대야 10, 회현 2, 임피 2, 서수 3, 옥서 4)

사업명

폐자원에너지화시설 민간투자사업

담당자

자원순환과 김지현(☎454-3453)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산시 폐기물매립장 사용연한 도래에 따른 쓰레기 처리에 대한 대책으로 공공소각시설 및 재활용선별시설 건립 추진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 5. 25. ~ 2021. 1. 21. (조성기간)

○ 위    치 : 군산시 새만금북로 630-28

○ 민간사업자 : 군산그린에너지센터(주)

○ 총사업비 : 1,237억원(국비 431 시비 12 민간 794)

○ 사업규모

- 소각시설(220톤/일), 재활용선별시설: 20톤/일, 순환형매립시설: 644,600㎡

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 관리운영권 설정 2021. 3. 2. ~ 2036. 3. 1.(15년간)

○ 지금까지 재정부담액(사용료) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	215,298	31,259	13,003	13,234	157,802
국 비
시 도 비
시군구비	215,298	31,259	13,003	13,234	157,802
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 2036. 3. 1. 까지 위탁 운영