개별 투자심사 사업 추진현황

별지 10

사업명

조촌동 행정복지센터 신축공사

담당자

행정지원과 이은정(☎454-2245)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청사의 노후화에 따른 주민불편 해소 및 근무여건 개선요망

○ 주민자치 프로그램 활성화를 통한 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 전북특별자치도 군산시 조촌동 909-4 일원

○ 규 모 : 지상 4층, 지하 1층 / 부지면적 1,511.7㎡(457평), 연면적 2,906.8㎡(879평)

- 연면적(지상층 2,101.7㎡, 지하층 805.16㎡), 건축면적 845.21㎡(255평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,254백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	9,254	121	2,575	6,538	20
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44%)

○ 건축허가 완료(2024. 3.)

○ 설계안전성 검토 완료(2024. 3.)

○ 원가심사 및 일상감사 완료(2024. 4.)

○ 설계용역 완료(2024. 5.)

○ 신축공사 착공(2024. 6.)

□ 향후계획

○ 공사 준공(2025. 12.)

사업명

시청~운동장간 도로개설공사

담당자

도시계획과 김광수(☎454-3522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 운동장~쌍천로간 도로개설 완료에 따른 연계 도로망 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 2. ~ 2030. 12.

○ 위 치 : 군산시청 ~ 월명체육관

○ 규 모 : L=790m, B=30m

- 1단계 : 도시계획도로 L=350m, B=30m

- 2단계 : 도시계획도로 L=440m, B=30m(터널 L=210m 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	43,000	1,621	2,858	2,000	36,521
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	43,000	1,621	2,858	2,000	36,521
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 1단계 공사 착공(‘24. 12.)

○ 2단계 토지보상 40% 완료

□ 향후계획

○ 2단계 토지보상 100% 완료(‘25. 12.)

○ 1단계 공사 준공(‘26. 6.)

○ 2단계 공사 준공(‘30. 12.)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

신덕~개정마을 도로확포장

담당자

도시계획과 황준엽(☎454-3664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 인근 지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2026

○ 위 치 : 군산시 옥구읍 상평리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.2km, B=3⟶10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,200	2,584	733	883	1,000
국 비	2,600	1,292	633	175	500
시 도 비
시군구비	2,600	1,292	100	708	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 실시계획인가 완료 : 2022. 11.

○ 도로확포장 공사 착공 : 2022. 12.

□ 향후계획

○ 도로확포장 공사 준공 추진(‘26. 2.)

□ 사업변경 내역

○ (당초) 사업기간 : 2018. ~ 2025.

(변경) 사업기간 : 2018. ~ 2026.

사업명

신풍동 소방도로개설

담당자

도시계획과 서대협(☎454-3663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2026

○ 위 치 : 군산시 신풍동 909-1 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=393m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,500	1,800	300	100	1,300
국 비	1,750	900	150	50	650
시 도 비
시군구비	1,750	900	150	50	650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 실시계획인가 완료 : 2020. 5.

○ 소로 3-79, 3-80 도로개설공사 준공(L=247m, B=6m) : 2021. 4.

○ 소로 3-76 도로개설공사 착공 : 2024. 10.

□ 향후계획

○ 소로 3-76 도로개설공사 준공 추진(‘25. 8.)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

지방도 709호선 확포장공사

담당자

도시계획과 강형기(☎454-3662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009 ~ 2025

○ 위 치 : 옥구읍 일원 지방도 709호선(옥구초교 ~ 옥서삼거리)

○ 규 모 : 도로확포장 L=4.2km, B=12m→19m~24m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	27,900	25,900	1,000	1,000
국 비	13,670	12,670		1,000
시 도 비
시군구비	14,230	13,230	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2022.02. ~ 2023.12. : 지방도 709호선 확포장(2,3차분) 추진

○ 2024.03. ~ 2024.12. : 지방도 709호선 확포장(4차분) 추진

□ 향후계획

○ 2025. 10. : 예비 준공검사 및 시설물 인수인계 사전협의

○ 2025. 11. : 지방도 709호선 확포장공사 준공 계획

□ 사업변경 내역

○ (당초) 총사업비 : 25,900백만원,  사업기간 : 2009. ~ 2023.

(변경) 총사업비 : 27,900백만원,  사업기간 : 2009. ~ 2024.

사업명

옥서면 농어촌도로 304호선 확포장

담당자

도시계획과 황준엽(☎454-3664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 인근 지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2026

○ 위 치 : 군산시 옥서면 구호촌교차로 농어촌도로 304호선

○ 규 모 : 도로확포장 (304호선)L=1.96km, B=7⟶12m

(면소재지)L=0.73km, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,000	2,466	1,200	400	3,934
국 비	4,000	1,233	1,100		1,667
시 도 비
시군구비	4,000	1,233	100	400	2,267
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 실시계획인가 완료 : 2022. 6.

○ 도로확포장 공사(304호선) 착공 : 2022. 8.

○ 도로확포장 공사(304호선) 준공 : 2025. 4.

○ 도로확포장 공사(면소재지) 착공 : 2025. 5.

□ 향후계획

○ 도로확포장 공사(면소재지) 준공 추진(‘26. 6.)

□ 사업변경 내역

○ (당초) 총사업비 : 10,00백만원

(변경) 총사업비 : 8,000백만원

사업명

공항로 기반시설 설치 및 정비사업

담당자

도시계획과 강형기(☎454-3662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 공항로 일원

○ 규 모 : L=8km, 기반시설 설치 등 도로정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	15,000	14,100	900
국 비	7,500	7,350	150
시 도 비
시군구비	7,500	6,750	750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 옥서면 일원 도시가스 공급사업 공급관 설치 완료

○ 2025.06. : 산북동(신성,갈마)일원 도시가스 L=5.6km공급 추진

□ 향후계획

○ 2025.11. : 산북동(신성, 갈마)일원 도시가스 공급사업 완료 예정

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

4토지~리츠프라자호텔 도로개설 및 확장

담당자

도시계획과 강형기(☎454-3662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2026

○ 위 치 : 군산시 산북중학교 ~ 리츠프라자호텔

○ 규 모 : 도로개설 및 확장 L=3.2km, B=12m→19m~24m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 41,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	41,000	11,508	5,700	4,661	19,131
국 비	20,500	6,162	4,100	2,000	8,238
시 도 비
시군구비	20,500	5,346	1,600	2,661	10,893
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2023.01 : 4토지~리츠프라자호텔 도로개설공사 1차분 준공

○ 2024.10. : 2차분 터널부(토공, 발파) 공사 준공

□ 향후계획

○ 2025. 하반기. : 터널부 라이닝 타설 추진

○ 2026. 09. : 산북중~리츠프라자호텔 구간 완료 예정

□ 사업변경 내역

○ (당초) 총사업비 : 35,000백만원,  사업기간 : 2019. ~ 2023.

(변경) 총사업비 : 41,000백만원,  사업기간 : 2019. ~ 2024.

사업명

나운3동일원 도로개설 및 확장공사

담당자

도시계획과 서대협(☎454-3663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2026

○ 위 치 : 군산시 미룡동 450-3 일원

○ 규 모 : 도로개설 및 확장 L=780m, B=6~10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,200	216	1,500		1,484
국 비	1,600	100	1,350		150
시 도 비
시군구비	1,600	116	150		1,334
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시계획인가 완료 : 2020. 6.

○ 소로 3-408호선 도로개설공사 착공 : 2024. 11.

□ 향후계획

○ 소로 3-76 도로개설공사 준공 추진(‘25. 7.)

○ 소로 1-270호선, 소로1-271호선 도로개설공사 착공 추진(‘26. 3.)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

고군산군도 내부도로(무녀선) 확포장공사

담당자

건설과 빙기권 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2026

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 일원(1공구)

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.8km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	2,975	584	0	441
국 비	3200	2,380	468	0	352
시 도 비	400	297.5	58.5	0	44
시군구비	400	297.5	58.5	0	44
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1공구 기본 및 실시설계 완료 : ‘20. 12월

○ 1공구 편입토지 보상계획 완료 : ‘21.  8월

○ 1공구 보상추진 (협의보상 3회) : ‘23.  6월

○ 1차분 공사 착공              : ‘23. 12월

□ 향후계획

○ 1공구 공사 준공              : ‘26.  6월 ~

사업명

고군산군도 내부도로(신시선) 확포장공사

담당자

건설과 빙기권 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2027

○ 위 치 : 군산시 옥도면 신시도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.2km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,700	4,020	500	200	2,980
국 비
시 도 비
시군구비	7,700	4,020	500	200	2,980
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 1공구 기본 및 실시설계 완료  : ‘19. 12월

○ 1공구 착공                   : ‘20.  1월

○ 1공구 준공                   : ‘22.  6월

○ 2공구 보상추진               : ‘24. 7월 ~

□ 향후계획

○ 2공구 1차분 공사발주          : ‘25. 9월 ~

□ 사업변경 내역

○ 사업계획변경

사업명

고군산군도 내부도로(장자선) 확포장공사

담당자

건설과 빙기권 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 장자도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.3km, B=3→6.5m, 교량재가설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,900	4,000	300	1,100	1,500
국 비
시 도 비
시군구비	6,900	4,000	300	1,100	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 기본 및 실시설계 완료  : ‘20. 12월

○ 장자선 공사착공        : ‘22.  6월

○ 가설교량 설치          : ‘23. 12월

□ 향후계획

○ 공사 준공               : ‘25.  7월

사업명

선유3구 남악마을 도로확포장공사

담당자

건설과 빙기권 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선유도를 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2026

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.5km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,600	2,400	1,600	0	2,600
국 비
시 도 비
시군구비	6,600	2,400	1,600	0	2,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 기본 및 실시설계 완료  : ‘20. 12월

○ 편입토지 보상협의      : ‘21.  2월 ~

○ 공사 착공              : ‘24.  12월 ~

□ 향후계획

○ 1차분 준공 및 2차분 발주  : ‘26.  2월 ~

사업명

군도 6호선(석화~고척) 도로확포장공사

담당자

건설과 빙기권 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시내버스 통과구간의 협소한 도로 확장으로 지역주민에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 군산시 대야면 석화마을 ~ 고척마을 간

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.5km, B=4→8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,200	1,398	1,802	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	3,200	1,398	1,802	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 실시설계 완료         : ‘20. 5월

○ 토지보상              : ‘23. 4월

○ 2차분 준공            : ‘23. 1월

○ 공사 준공             : ‘24. 12월

사업명

옥구면도 105호(옥정마을) 도로확포장공사

담당자

건설과 빙기권 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥구읍 옥장리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.0km, B=4→8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,700	1,150	200	200	1,150
국 비
시 도 비
시군구비	2,700	1,150	200	200	1,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 착수         : ‘20. 3월

○ 보상계획공고          : ‘21. 8월

○ 감정평가 의뢰         : ‘22. 6월

○ 편입토지 보상협의     : ‘23.  7월 ~

□ 향후계획

○ 공사 착공             : ‘25.  10월 ~

사업명

옥도리도 203호 도로확포장공사

담당자

건설과 빙기권 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.5km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,600	400	500	200	1,500
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	400	500	200	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ 실시설계 착수         : ‘20. 3월

○ 문화재 현상변경 결정  : ‘22. 5월

○ 실시설계 완료         : ‘22. 7월 ~ ’22. 12월

○ 공사 착수             : ‘24. 7월

□ 향후계획

○ 공사 준공             : ‘25. 10월

사업명

회현리도 210호선 도로확포장공사

담당자

건설과 빙기권 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 회현면 회현초교 ~ 척동마을 간

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.6km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,700	2,350	0	0	1,350
국 비
시 도 비
시군구비	3,700	2,350	0	0	1,350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%)

○ 실시설계 완료         : ‘19. 12월

○ 편입토지 보상 및 착공 : ‘19. 12월

□ 향후계획

○ 1공구 공사 준공       : ‘25. 8월

사업명

옥산 리도 206호선(대려~금성) 도로확포장공사

담당자

건설과 빙기권 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥산면 옥산리 ~ 회현면 금성리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.7km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	150	300	0	3,550
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	150	300	0	3,550
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 착수         : ‘21.  3월 ~

○ 실시설계 완료         : ‘23.  12월 ~

○ 환경영향평가 협의     : ‘24.  3월 ~

□ 향후계획

○ 보상추진              : ‘25. 9월 ~

사업명

대야 삼라교 재가설공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 개설 및 확장을 통한 지역주민 교통편익 제공과 농산물 생산 ‧유통을 향상시켜 농어촌지역의 생활환경 개선 및 경제활동 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2024.

○ 위 치 : 대야면 접산리 라궁(농도 314호 접산선)

○ 규 모 : 접속도로 L=1.27km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,972,091,600원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,972	3,475	496
국 비
시 도 비	3,972	3,475	496
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘21. 09 : 도로 노선지정공고

○ ‘22. 01 : 수용재결 신청(지방토지수용위원회)

○ ‘22. 05. : 수용재결 완료

○ ‘23. 12. : 2차분 준공

○ ‘25. 05. : 삼라교 재거살공사 준공

사업명

서수리도 206호(외무장선) 도로확포장공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 개설 및 확장을 통한 지역주민 교통편익 제공과 농산물 생산 ‧유통을 향상시켜 농어촌지역의 생활환경 개선 및 경제활동 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2027.

○ 위 치 : 서수면 축동리 283-2번지 일원(외무장마을 진입로)

○ 규 모 : 도로확․포장 L=1.0km, B=3→6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,120,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,120	200	1,000	-	1,920
국 비
시 도 비	3,120	200	1,000	-	1,920
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘22. 07.    : 실시설계 용역 착수

○ ‘22. 11.    : 노선안 주민의견 청취(주민설명회) 및 의견검토

○ ‘23. 12.    : 실시설계 및 영향평가(환경, 재해) 용역 완료

○ ‘24. 02.    : 보상계획 열람공고 및 이해관계인 의견청취

○ ‘25.  1.    : 토지보상 협의 추진

□ 향후계획

○ ‘25. 하반기 : 토지보상 및 공사발주 추진

※ 토지 보상협의 진행 추이에 따라 공사 발주 검토

사업명

동백대교 경관조명 설치공사

담당자

건설과 박봉순(☎454-7981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동백대교 이용자가 안전하고 불안감 없이 통행할 수 있는 조명환경 확보

○ 동백대교 교량의 안전성과 심미성 강화 및 조화로운 야간환경개선 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2023

○ 위 치 : 동백대교 L=1.93km

○ 내 용 : 교량 및 아치부 조명설비 보강 및 개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	4,000
국 비	2,000	2,000
시 도 비
시군구비	2,000	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘22.09 ~ ‘22.12 : 공사 발주 및 계약 절차 이행

○ ‘23.01 ~ ‘23.12 : 공사 착공 및 추진

○ ‘24.01 ~ ‘24.03 : 시범운영, 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

가로등 에너지 절감 LED 교체 사업

담당자

건설과 박봉순(☎454-7981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지절감 고효율 LED등기구 교체로 가로등 전기요금 절감

○ 노후 도로조명을 LED조명으로 교체하여 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027

○ 위 치 : 군산시 관내

○ 규 모 : 노후 가로등 6,495등 교체

(노후 가로등 기구 250W~200W ⇨ LED가로등기구 150W~100W)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,900	300	900	900	1,800
국 비
시 도 비
시군구비	3,900	300	900	900	1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

○ ‘23.09~‘23.12 : 2023년 가로등 에너지 절감 LED 교체사업 완료(532등)

○ ‘24.01~‘24.07 : 2024년 가로등 에너지 절감 LED 교체사업 완료(1,500등)

○ ‘25.01~‘25.12 : 2025년 가로등 에너지 절감 LED 교체사업 진행(1,500등)

□ 향후계획

○ 2026~2027년까지 연차별 사업비 확보하여 연도별 사업 추진 예정

(900,000,000원/년× 2년 = 1,800,000,000원)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

고령자 복지주택사업

담당자

주택행정과 전남진(☎454-3714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전 세계적으로 노인인구의 급격한 증가로 고령화 사회가 빠르게 진행되면서 노인문제가 사회문제의 중심으로 떠오르는 가운데 고령사회의 충격을 대비한 맞춤형 임대주택 및 복지서비스 공급으로 65세이상 노령층 등의 주거안정 불안을 해소하고 복지시설을 일체화하여 주거･복지혁신을 통한 실질적인 삶의 질을 높이기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2024년

○ 위 치 : 전라북도 군산시 오룡동 900-40번지 일원

○ 규 모 - 주택건설 : 고령자 복지주택 150호(전용 26㎡)

- 복지시설 : 1층 연면적 1,196.25㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,041백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	22,041	21,487	93	119	342
국 비	14,911	14,911	-	-	-
시 도 비	0	-	-	-	-
시군구비	2,251	1,697	93	119	342
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	4,879	4,879	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업계획(최초) 승인 : 2019. 12.

○ 사업계획(1차변경) 승인 : 2021. 05.

○ 공사착공 : 2021. 08.

○ 지하구조물 완료 : 2022. 10.

○ 골조공사 완료 : 2023. 09.

○ 사업계획(2차변경) 승인 : 2023. 11.

○ 공사 준공 : 2024. 06.

○ 사용검사 승인 : 2024. 06.

□ 향후계획

○ 우리 시와 LH의 사업비 정산 항목 부담금 협의

사업명

상권활성화사업(구도심상권르네상스)

담당자

일자리경제과 강봉국(☎454-2682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산공설시장 등 100년의 장터를 新소비트랜드에 맞는 쇼핑공간 구축

○ 쇼핑⋅문화⋅소통 플랫폼 연계 구축으로 상권진작 및 상인자생력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2025. 3. (5년)

○ 위 치 : 구도심 상권활성화구역(공설시장, 신영시장, 중앙상가)

○ 규 모 : 177,650㎡ / 사업체수 : 607개(빈점포 131개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,000백만원 (국비 4,000, 도비 800, 시비 3,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,000	6,600	1,400
국 비	4,000	3,300	700
시 도 비	800	660	140
시군구비	3,200	2,640	560
지 방 채	0	0	0
민간자본	0	0	0
기 타	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘18. 12. 7. ○ ‘19. 1. 14. ○ ‘19. 1. ~ 2. ○ ‘19. 6. ○ ‘19. 9. 16. ○ ‘19. 12. 10. ○ ‘20. 4. 14 ○ ‘20. 4. ~ ‘24. 3. ○ ‘24. 4. ~ ‘25. 3. ○ ‘25. 5	: 2018 상권르네상스 프로젝트 사업 공고 : 상권활성화재단설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고 : 상권활성화사업 사업계획 수립, 사업추진협의회 구성 : 상권활성화사업 투자심사 : 2019 상권르네상스 사업 공모 : 상권르네상스 사업 선정 : 사업계획서 및 상권활성화구역 중기부 협의후 전북도 승인 : 1~4년차 상권르네상스 사업 추진 : 5년차 상권르네상스 사업 추진 : 5년차 사업 정산 완료

사업명

이차전지 기업 역량강화 지원사업

담당자

신성장산업과 박창주(☎454-4132)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이차전지 신기술 연구를 통한 초격차 기술확보로 이차전지 소재분야의        공급망 강화를 통한 글로벌 허브 조성

○ 이차전지 국가첨단기술 확보를 통한 기업의 경쟁력을 강화하고 군산시        주력산업과의 연계협력을 통한 지역산업 동반 성장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2024년

○ 대 상 : 도내 이차전지 기업

○ 규 모 : R&D 역량강화 지원 7건 및 인력양성, 연구활동 등 지원

- 선도기술융합형 R&D 지원 : 2건

- 생산기술융합형 R&D 지원 : 3건

- 자유공모형 R&D 지원 : 2건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,000	3,000	-	-	-
시 도 비	1,500	1,500	-	-	-
시군구비	1,500	1,500	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 선도 및 생산기술융합형 R&D 지원 5건 / 자유공모형 R&D 지원 2건

○ 2024년 12월 사업 종료 후 2025년 7월 중 사업 정산 예정

□ 향후계획

○ 이차전지 특화단지 내 입주기업들의 R&D 역량강화를 통한 이차전지 소재·       부품 기술 자립화 및 국내 공급망 확대가 필수적 사항인 만큼 군산시 관내

이차전지 전후방 기업들로 한정한 신규 사업 진행 예정

사업명

전북 군산 강소연구개발특구 육성 지원사업

담당자

신성장산업과 최란(☎454-2742)

□ 사업목적 및 필요성

○ “R&D-기술사업화-기업성장-재투자”의 선순환 산업생태계 조성

○ 전주기에 걸친 기업 맞춤형 컨설팅·기술지원을 통한 기술사업화 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. ~ 2026. 2.

○ 위 치 : 군산국가·2산단, 새만금산단(1공구)

○ 규 모 : 2.70㎢ (기술핵심기관 0.86㎢, 배후공간 1.84㎢)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,965백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	24,965	17,350	3,450	4,165	-
국 비	15,915	12,000	1,600	2,315	-
시 도 비	4,000	2,300	850	850	-
시군구비	5,050	3,050	1,000	1,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 기술발굴 및 연계 : 기술이전 및 출자 180건, 연구소기업 등록 28건

○ 강소형 기술창업 육성 : 창업 49건, 투자연계 477억원

○ 강소특구 특화성장 지원 : 지역 내 혁신 주체 간 네트워크 운영 및 특화

분야 기업육성 지속 지원

□ 향후계획

○ 지역 특성화 육성지원 및 혁신네트워크 추진	: 상시

○ 수요기반 사업화 우수기술 발굴·이전 및 연구소기업 발굴	: 상시

□ 사업변경 내역

○ 변경내역 : 총사업비 23,150백만원 → 24,965백만원

○ 변경사유 : 지역 특성화 육성 활성화를 위한 사업비 추가 지원 등

사업명

전북군산 미래형 상용 모빌리티 소부장지원센터 구축사업

담당자

신성장산업과 송미정(☎454-2762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전북 군산 스마트그린산단 미래형 상용 모빌리티 산업생태계 활성화,

제조혁신 및 업종 고도화 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 군산 국가·2국가 산업단지 일원

○ 내 용 : 기업지원센터 구축, EV 전장부품 성능평가 지원 장비 구축 및

스마트 제조공정기술 인력양성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,660백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	19,660	4,750	4,890	4,910	5,110
국 비	13,700	4,500	3,000	3,000	3,200
시 도 비	1,470	-	490	490	490
시군구비	3,430	-	1,130	1,150	1,150
민간자본	1,060	250	270	270	270

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 주관기관(민간) 공모(산단공) 및 선정(군산대)	: ‘23. 4.

○ 사업 세부계획 수림 및 협약 체결	: ‘23. 5.

○ 기업지원사업 설명회 개최	: ‘23. 8.

○ 시험장비 및 기술교육 등 추진                            : ‘24. 6.~ 12.

○ EV 상용차량 가상환경 시뮬레이션 등 장비 구축           : ‘24. 12.

○ 기업지원사업 참여기업 모집 및 선정                      : ‘25. 4.

□ 향후계획

○ 기업 컨설팅, 제작지원 시행 완료                         : ‘25. 9.

○ 3차년도 장비 6종 도입 완료                              : ‘25. 12.

○ 기업지원센터 리모델링 추진 완료                         : ‘25. 12.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

산업단지 복합문화센터 건립

담당자

기업지원과 임소영(☎454-2773)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 내 문화‧체육‧편의시설 미비로 인한 청년‧기술인력의 취업기피 분위기 전환, 지역주민 및 근로자 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2024. 09.

○ 위 치 : 군산시 오식도동 661번지

○ 규 모 : (건축면적) 1,373.87㎡ / (연 면 적) 3,019㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,474백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,474	9,243	231	-	-
국 비	3,182	3,100	82	-	-
시 도 비	954	930	24	-	-
시군구비	5,338	5,213	125	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 산업단지 복합문화센터 건립사업 협약체결          : ‘19. 11.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 설계용역 추진     : ‘20. 11.~‘21. 12.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 착공              : ‘22. 05.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 준공              : ‘23. 09.

○ 산업단지 복합문화센터 내부 공사 및 집기설치      : ‘24. 01.~‘24. 06.

○ 산업단지 복합문화센터 시범운영                  : ‘24. 07.~‘24. 08.

○ 산업단지 복합문화센터 개관                       : ‘24. 09.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) ‘19.11.01.~‘24.06.30. ⇒ (변경) ‘19.11.01.~‘24.09.30.

○ 부지면적 : (당초) 1,790㎡ ⇒ (변경) 2,343㎡

○ 건축규모 : (당초) 3,260㎡ ⇒ (변경) 3,019㎡

○ 주요기능 : (당초) 복합문화공간, 카페 등 ⇒ (변경) 평생학습센터, 기업지원실 등

사업명

농공단지 에너지관리시스템

기술도입 모델사업

담당자

기업지원과 김재민(☎454-2752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지 절감 및 에너지 효율 증대를 통해 탄소배출 절감 및 녹색성장 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 11. ~ 2025. 3.

○ 위 치 : 군산시 서수농공단지 일원

○ 규 모 : FEMS, 에너지 통합관리시스템 및 분산전원(태양광 발전장치) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,450	-	1,725	725
국 비	1,715	-	1,715	-
시 도 비	220	-	10	210
시군구비	515	-	-	515

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  95%)

○ 공모사업 신청 및 선정                              : ‘23.  6. ~  8.

○ 세부계획 확정 및 참여 희망업체 접수 완료           : ‘23. 10. ~ 11.

○ 민간위탁기관 협약(군산시, 디이시스) 체결            : ‘24. 2.

○ FEMS, 에너지 통합관리시스템 및 분산전원 구축      : ‘24. 7. ~ ‘25. 3.

□ 사업변경 내역

○ 변경내역 : 사업기간 변경（당초 ‘23.9. ~ ‘24.12. → 변경 ‘23.9. ~ ‘25. 3.)

○ 변경사유 :　에너지통합시스템 데이터 수집 안정화 기간 필요

사업명

조선기자재기업 신재생에너지 업종전환 지원

담당자

기업지원과 고무성(☎454-2732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산조선소 가동중단에 따라 침체된 지역경제 활력을 불어 넣기 위해서 새로운 성장동력 확보

○ 조선기자재업체의 어려운 재정여건 등을 고려, 원활한 업종전환을 위한 지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020 ~ 2024. 6.

○ 사업내용 : 협동화공장 및 장비 23종 구축

○ 전담기관 : 한국에너지공단 / 주관기관 : 전북도, 군산시

○ 수행기관 : 군산조선해양기술사업협동조합

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	29,700	28,750	950	-	-
국 비	17,490	17,490	-	-	-
시 도 비	3,000	3,000	-	-	-
시군구비	7,000	6,258	742	-	-
자 부 담	2,210	2,002	208	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 조선기자재 업종전환을 위한 협동조합인가 및 설립       : ‘18. 5. 25.

○ 사업계획 승인(산업통상자원부)                         : ‘20. 6. 22.

○ 협약 체결(한국에너지공단&전북도&군산시)             : ‘20. 7. 15.

○ 협동화공장 매입(연면적 19,082㎡)                      : ‘20. 10. 30.

○ 사업계획 변경 (사업기간 변경 등)                      : ‘23. 12. 29.

○ 장비 23종 구축완료                               : ‘22. 1. ~‘23. 12.

○ 도장동 증축공사 준공                                 : ~ ‘24. 6.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : (당초) 2020 ~ 2023. 12 → (변경) 2020 ~ 2024. 6

- 변경사유 : 장비 입찰공고 유찰 및 도장동 설계 변경

사업명

에너지인력양성사업

(초대용량 풍력발전시스템 혁신연구센터)

담당자

신재생에너지과

유현희(☎454-4414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 초대용량 풍력발전시스템 개발을 위한 선도기술 지식 및 산‧학 컨소시엄 기반 교육 프로그램 개발을 통한 글로벌 최정상급 인재 양성

○ 초대용량 풍력발전시스템 핵심분야별 초격차 유지 및 기술 격차 해소를 위하여 국내 최우수 대학연구실과 대표기업들이 공생하는 산‧학 협력 R&D 프로그램 개발을 통한 미래 기술 도출 및 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. 1. ~ 2028. 12. 31.

○ 위 치 : 군산대학교 새만금캠퍼스(신재생에너지특성화관)

○ 규 모 : 초대용량 풍력발전시스템 혁신연구센터 운영 1식

- (교육) 초대용량 풍력발전시스템 다양성‧전문성‧입체성 있는 교육 체계 구축

- (R&D) 국내 기술 경쟁력 강화를 위한 초대용량 풍력발전시스템 관련 5개 핵심부품 분야, 9개 핵심기술을 대학과 참여기업이 함께 개발 및 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,372백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		2023년	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,372	1,319	1,229	1,456	4,368
국 비	5,780	1,000	780	1,000	3,000
시 도 비	100	0	20	20	60
시군구비	100	0	20	20	60
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	2,392	319	409	416	1,248
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도)

○ 혁신연구센터 1단계 사업 추진	: ‘22. 4.~‘23. 3.

	1단계 사업개요
□ 기 간 : 2022. 4. ~ 2023. 3. (12개월) □ 사 업 비 : 1.5억원(국비 1, 민간 0.5) □ 주 관 : 군산대학교 *참여기관(부산대학교) *참여기업(㈜KTE) □ 사업내용 : 초대용량 풍력시스템 관련 원천기술 확보 및 석‧박사급 인력양성을 위한 혁신연구센터구축 기획

○ 2단계 추진을 위한 관계기관 협의	: ‘23. 3.

-  [전라북도, 군산시] 행・재정적 지원     [기업] 인력 지원 및 참여, 재정적 지원

○ 참여기관 협약 체결	: ‘23. 8.

○ 3차년도 보조금 지급 및 사업 추진	: ‘25. 3. ~ 12.

□ 향후계획

○ 초대용량풍력발전시스템 혁신연구센터 운영	: ~ ‘28. 12.

- 2025년 성과 목표 : 석박사(12명), 수혜학생(25명), 논문(8건), 특허 출원/등록(2/2)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

재생에너지 디지털트윈 및 친환경교통 실증연구기반 구축사업

담당자

신재생에너지과

장잔디(☎454-4412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래‧친환경 에너지를 한 곳에서 종합적으로 실증할 수 있는 인프라 구축 및 실증 R&D를 통해 재생에너지 산업경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2025.(6년)

○ 위 치 : 새만금 산업연구용지 2공구 연 7-3 및 공유수면

○ 규 모 : 국가종합실증연구단지(50,250㎡) 및 통합관제센터(5,076㎡) 구축, 신재생에너지 발전시설 및 실증설비 구축, 통합실증 R&D 지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 168,062백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	168,062	111,619	32,592	23,851	0
국 비	63,582	40,119	6,692	16,771	0
시 도 비	13,565	7,455	5,110	1,000	0
시군구비	13,565	7,455	5,110	1,000	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	77,350	56,590	15,680	5,080	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 입주계약 체결 완료	: 2022. 12.

○ 통합관제센터 설계 완료	: 2023. 1. ~ 8.

○ 연약지반 개량공사 착수 및 준공	: 2023. 9. ~ 2024. 9.

○ 단지 인프라 조성 및 통합관제센터 구축 착공      : 2024. 4. ~

□ 향후계획

○ 단지 인프라 및 통합관제센터 구축 준공	: 2025. ~ 11.

○ 통합관제센터 시스템 장비 구축 및 시운전	: 2025. 12.

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	증감
계(백만원)	171,960	170,832	△1,128
국	64,710	63,582	△1,128
도	14,950	14,950	-
시	14,950	14,950	-
자부담	77,350	77,350	-

: 사업비 변경     ※ R&D사업 평가 및 조정으로 국비 감액

사업명

해상풍력 산업지원센터 구축사업

담당자

신재생에너지과 두건희(☎454-4413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해상풍력 보급 확대 및 산업 활성화를 위한 단지 조성 지원, 수용성 제고 및 전문인력 양성 등의 종합지원 센터 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2025.(6년)

○ 위 치 : 새만금 산업연구용지 2공구 연 7-11

○ 규 모 : 부지 14,000㎡, 연면적 6,979㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	47,700	35,600	12,100	0	-
국 비	21,600	15,600	6,000	0	-
시 도 비	13,050	10,000	3,050	0	-
시군구비	13,050	10,000	3,050	0	-
지 방 채	0	0	0	0	-
민간자본	0	0	0	0	-
기 타	0	0	0	0	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 센터 설계 추진 중	: 2022. 6. ~

○ 입주계약 체결 완료	: 2022. 8.

○ 지방비 추가확보(추정공사비 증가에 따른 지방비 확보 필요) : 2023. 12.

○ 센터 설계 완료	: 2024.

○ 시공사 발주 및 선정	: 2024. 11. ~ 12.

○ 센터 구축공사 착공	: 2025. 4.

□ 향후계획

○ 사업기간 연장	: 2025. 하반기

○ 센터 준공	: 2026.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

군산시 수소충전소 구축사업

담당자

신재생에너지과 장잔디(☎454-4412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재생에너지 디지털트윈 및 친환경교통 실증연구기반 구축사업과 연계하여 그린수소 충전 인프라 및 친환경 교통 시스템 구축

○ 수소차 보급 기반 마련 및 이용자 편익 증대를 통한 수소 경제 생태계 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2025.

○ 위 치 : 군산시 신관동 42-78

○ 규 모 : 충전용량 60kg/h 이상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,000	6,000	0	0	0
국 비	6,000	6,000	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	0	0	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 사업계획 수립	: 2023. 10.

○ 구축 위·수탁 업무협약 체결	: 2023. 12.

○ 수소충전소 구축 부지 및 운영자 공개 모집	: 2024. 12.

○ 충전소 구축 부지 및 위탁기관 선정	: 2025. 2.

□ 향후계획

○ 군산도시가스 위탁계약 체결	: 2025. 하반기

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

해상풍력 단지개발 지원사업

담당자

신재생에너지과 두건희(☎454-4413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해상풍력 단지개발 지원사업을 통해 공공주도의 해상풍력 사업 추진 및 지역 경제 성장 동력 마련

□ 사업개요

○ 위 치 : 군산 해역 및 서해 EEZ 인근

○ 기 간 : 2022. 6. ~ 2025. 12.

○ 규 모 : 해상풍력 집적화단지 발굴(GW급)

○ 내 용 : 해상풍력 단지개발을 위한 주민수용성 확보 및 사전 타당성 검증

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,558백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,558	4,800	1,758	0	0
국 비	3,259	2,400	859	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,299	2400	899	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 공공주도 해상풍력 단지개발 지원사업 공모 신청 및 선정  : 2022. 4.

○ 참여기관(전북TP) 인허가 사전타당성 검증 추진           : 2023. 3. ~

○ 군산시 해상풍력 민관협의회 구성 및 운영(14회)           : 2023. 6. ~

○ 주관기관(군산시) 주민수용성 조사·확보 추진              : 2024. 1. ~

○ 해상풍력 단지개발 이행사항 공유 및 전문가 논의 추진    : 2024. 1. ~

○ 군산시 해상풍력 집적화단지 주민설명회 개최             : 2025. 7.

□ 향후계획

○ 군산시 해상풍력 사업자 포럼 개최	: 2025. 하반기

○ 군산시 해상풍력 집적화단지 지정 신청	: 2025. 하반기

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

진포예술제

담당자

문화예술과 윤덕환(☎454-3282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 예술문화 향유기회 제공으로 시민 정서 함양

○ 지역예술문화 창달 및 예술문화의 미래상 제시

○ 시민과 함께하는 문화예술을 통한 저변확대 및 예술문화 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2025년~2029년

○ 위    치 : 군산예술의 전당 및 은파호수공원 일원

○ 사업내용 : 군산예총과 10개협회가 개최하는 순수예술 문화행사

○ 지원형태 : 보조금 지원

○ 보조사업자 : (사)한국예총 군산지회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 498백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	498	122	122	124	130
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	498	122	122	124	130
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024년 진포예술제 개최                         : 2024. 5. 9. ~ 5. 30.

- 개막공연 등 무대공연, 영화상영, 전시 행사 등

□ 향후계획

○ 다양한 콘텐츠 등을 활용한 진포예술제의 성공적 개최 추진

사업명

상주사 불교문화체험관 건립

담당자

문화예술과 최세연(☎454-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통문화(명상‧다도) 체험을 통한 지역 관광 활성화 도모 및 지역문화 거점 육성

○ 불교문화 체험과 문화유산 교육의 장으로 종교문화 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. ~ 2025.(3년)

○ 위    치 : 군산시 서수면 축동리 544번지 외 4필지

○ 사업내용 : 지상1층, 2개동(연면적 333.72㎡)

- 불교문화체험관 199.80㎡, 사찰음식체험관 133.92㎡

○ 사업유형 : 민간자본보조사업

○ 시행‧운영주체 : 대한불교조계종 상주사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,000	0	3,000	0	0
국 비	900	0	900	0	0
시 도 비	540	0	540	0	0
시군구비	1,260	0	1,260	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	300	0	300	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 지방재정투자심사 심의 완료                         : 2023. 3.

○ 제2차 추가경정예산 사업예산 반영                   : 2023. 6.

○ 문화재현상변경 심의위원회                           : 2023. 10.

○ 불교문화체험관 실시설계 용역 실시                   : 2023. 12.

○ 불교문화체험관 실시설계 용역 완료                   : 2024. 5.

○ 불교문화체험관 공사 착공                            : 2024. 7.

□ 향후계획

○ 불교문화체험관 공사 준공                                 : 2025. 8.

사업명

은적사 전통문화체험관 건립

담당자

문화예술과 최세연(☎454-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 불교문화 체험과 문화유산 교육의 장으로 종교문화 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2026.(3년)

○ 위 치 : 군산시 소룡동 산 127-1번지 내

○ 규 모 : 3개동 / 1층 / 연면적 550.44㎡

- 전통문화체험관 112.32㎡, 음식체험관 232.2㎡, 명상체험관 205.92㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	0	300	4,700
국 비	1,500	0	75	1,425
시 도 비	900	0	45	855
시군구비	2,100	0	105	1,995
지 방 채	0	0	0	0
민간자본	500	0	75	425
기 타	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 지방재정투자심사 심의 완료                         : 2023. 10.

○ 사업계획 변경안 제출 및 승인통보                   : 2024. 8.

○ 전통문화체험관 설계용역 착수                       : 2024. 9.

○ 전통문화체험관 설계용역 중지(인허가협의)  : 2024. 12. ~ 2025. 6.

○ 불교문화체험관 실시설계 용역 완료                  : 2025. 7.

□ 향후계획

○ 일상감사 의뢰 및 보조금 교부 결정 및 이체          : 2025. 7.

○ 불교문화체험관 공사 착공                           : 2025. 8.

○ 불교문화체험관 공사 준공                           : 2026. 12.

□ 사업변경 내역

항목	변경 전	변경 후	비고
사업기간	2024.~2025.(2개년)	2024.~2026.(3개년)
건축용도	전시교육시설	전통음식체험관
연면적	500㎡ - 명상체험관 : 150㎡ - 전통문화체험관 : 150㎡ - 전시교육 편익시설 : 200㎡	550.44㎡ - 명상체험관 : 205.92㎡ - 전통문화체험관 : 112.32㎡ - 전통음식체험관 : 232.20㎡

사업명

2024 군산 문화유산 야행

담당자

문화예술과 김영신, 박채연

(☎454-3923~3922)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대문화유산을 활용한 특색 있는 야간형 문화향유 프로그램 개발

○ 다양한 문화콘텐츠 개발 및 볼거리 제공을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 8. 16.(금) ~ 8. 17.(토) 18:00~23:00

2024. 8. 23.(금) ~ 8. 24.(토) 18:00~23:00

○ 위 치 : 내항 역사문화공간 및 원도심 일원

○ 주최/후원 : 군산시 / 국가유산청, 전북특별자치도

○ 내 용 : 8야(夜)를 테마로 문화유산 탐방·전시·공연·체험 등 50개 프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 585백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	585		585
국 비	234		234
시 도 비	105.3		105.3
시군구비	245.7		245.7

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 콘텐츠 개발 및 프로그램 기획                     : ‘23. 10. ~ 24. 2

○ 군산 문화유산 야행 기본계획수립                  : ‘24. 2.

○ 프로그램 행사 준비 및 홍보                       : ‘24. 4. ~ 7.

○ 군산 문화유산 야행 추진계획수립                  : ‘24. 7.

○ 사업 추진 및 평가                                : ‘24. 8. ~

○ 2024년 군산문화유산야행 프로그램 참여자 수

합계	군산시민	타지역	외국인	비고
301,279명	145,490명 (48.3%)	154,623명 (51.3%)	1,166명 (0.4%)	카운터기 운영

□ 향후계획

○ 2026년 군산 국가유산 야행 공모 신청                 : ‘25. 7.

○ 2025년 군산 국가유산 야행 추진 및 평가              : ‘25. 8. ~ 9.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

해상 인도교 스카이워크 조성

담당자

관광진흥과 조윤관(☎454-3344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 해상절경을 관망할 수 있는 구)해상인도교를 활용한 구조보강, 경관조명 및 스카이워크 설치로 관광객 체험욕구 충족 및 관광활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023(4년)

○ 위 치 : 옥도면 장자교, 선유교

○ 규 모 : 스카이워크 조성 2개소(각 L=268m, B=3m, 1986년 준공)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,200	3,000	200
국 비
도 비	1,500	1,500
시 비	1,700	1,500	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 장자교 스카이워크 조성공사 준공                          : ‘22. 12.

○ 장자교 스카이워크 경관조명공사 준공                      : ‘23.  6.

○ 선유교 스카이워크 조성공사 착공                          : ‘23.  9.

○ 선유교 스카이워크 조성공사 준공                          : ‘24.  7.

□ 사업변경 내역

변경사항	당 초	변 경	변경사유
사업비	3,000백만원	3,200백만원	사업비 초과에 따른 시비 추가 반영

사업명

제2차 대표관광지 육성사업

담당자

관광진흥과 이영교(☎454-3332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경유형 유입 관광객을 체류형 관광객으로 전환하기 위해 근대문화자원을 배경으로 한 다양한 체험 및 즐길거리 개발 및 제공

○ 사계절 일반 관광객이 즐기고 관광에 대한 편의성을 확보할 수 있는 시설과 프로그램 도입이 절실함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2024년

○ 위 치 : 시간여행마을 일원

○ 내 용

- 관광기반(트래블라운지조성, 랜드마크조형물 설치, 골목정비 및 트릭아트거리 조성, 대표관광지 성과평가 용역)

- 관광진흥(시간여행축제활성화, 시간여행도시홍보, 미션게임운영, 시간여행상설공연, 해설사다양화, 아트마켓 운영, 성지순례 프로그램, 블로그 공모전)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,700	2,469	598	2,173	980
국 비
도 비	4,700	2,469	598	1,153
시 비	2,000			1,020	980

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 트래블라운지조성(진입로 CCTV 설치공사, 내외부 인테리어 및 경관조명공사 설계용역)

○ 골목정비 및 트릭아트거리 조성(기본 및 실시설계용역, 조형물 제작설치)

○ 관광진흥사업 추진(블로그 공모전, 성지순례 프로그램, 해설사다양화, 시간여행도시홍보,

시간여행상설공연, 시간여행축제활성화, 아트마켓 운영, 미션게임 운영)

□ 향후계획

○ 트래블라운지조성 지속추진

사업명

금강호 국민여가캠핑장 조성사업

담당자

관광진흥과 김승훈(☎454-3364)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이용객의 편의와 수요를 충족하는 금강호 생태와 연계한 휴식공간 조성

○ 국민여가캠핑장 조성을 통한 금강호의 전반적인 개발 및 활성화 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2024년

○ 위 치 : 성산면 성덕리 421-15번지 일원(금강호관광지)

○ 규 모 : 캠핑장 사이트 39면(일반 13, 오토 24, 대형 2), 주차장 21면 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,400	87	2,313
국 비
도 비	900		900
시 비	1,500	87	1,413
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역 추진                                   : ‘22. 5.~‘23. 9.

○ 공사 추진                                           : ‘23. 9.~‘24. 9.

사업명

비응마파지길 관광명소화사업

담당자

관광진흥과 김승훈(☎454-3364)

□ 사업목적 및 필요성

○ 비응도 및 비응마파지길 야간 경관조명 및 안내유도표지를 보강하여 관광객

유입 증대를 통한 침체되어 있는 비응항 상권 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2025년(4개년)

○ 위 치 : 비응도동 37번지 일원(비응마파지길)

○ 규 모 : 관광안내표지 확충, 스카이워크 설치, 광장 조성, 경관조명 보강, 포토존 및 휴게시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,500	104	633	2,763
국 비
도 비	1,500	55	588	857
시 비	2,000	49	45	1,906

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 비응마파지길 조성(41.5억원, L=1.8㎞)                       : ‘16.~‘19.

○ 지방재정투자심사(자체) 완료                                 : ‘21. 10.

○ 제7차 전북권 관광개발계획 반영                             : ‘21. 12.

○ 기본구상(안) 수립 및 실시설계 용역 완료                     : ‘24.  6.

○ 비응마파지길 관광명소화 사업 착공                           : ‘24. 11.

○ 비응마파지길 관광명소화 사업 전기공사 착공                  : ‘24. 12.

○ 비응마파지길 광장 조형물 제작                               : ‘25.  5.

□ 향후계획

○ 공사 완료                                                  : ‘25. 12.

□ 사업변경 내역

변경사항	당 초	변 경	변경사유
사업기간	2022~2024년	2022~2025년	공사 착공 시기 변경에 따른 사업기간 연장

사업명

군산시 선셋드라이브 명소화사업

담당자

관광진흥과 김승훈(☎454-3364)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서해를 품은 국도77호선과 주변 관광자원의 유기적 연계를 통한 시너지 창출로 체류형 관광기반을 구축하여 서해안권 광역관광 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023~2026년(4개년)

○ 위 치 : 신흥동 26-2번지 등 3개소

○ 규 모 : 월명산전망대 유니크베뉴 및 랜드마크 아이콘 조성, 선셋마켓 및 차박공원 조성, 새만금 어린이랜드 쉼터조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,600		411	630	5,559
국 비	3,300		375	315	2,610
도 비
시 비	3,300		36	315	2,949
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 서해안권 종합발전계획(변경) 고시                           : ‘22.  4.

○ 2023년 해안 및 내륙권 발전사업 신규사업 반영              : ‘23.  1.

○ 도 지방재정 투자심사 완료                                  : ‘23.  5.

○ 기본 및 실시설계용역 착수                                  : ‘24.  2.

○ 새만금어린이랜드 쉼터 조성공사 완료                        : ‘24.  9.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 완료                                  : ‘25.  9.

○ 공사 추진                                         : ‘25. 10.~‘26. 12.

사업명

월명산 달빛마루 관광자원화 사업

담당자

관광진흥과 유연태(☎454-3342)

□ 사업목적 및 필요성

○ 월명산 전망대 및 관광객 쉼터 준공 후 내외부의 관광기반시설 및 신규 콘텐츠 보강을 통해 새로운 볼거리, 체험거리 제공을 위한 후속사업 발굴·추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2026년

○ 위 치 : 시간여행마을권역(월명산전망대~근대역사박물관, 신흥동 26-2번지 일원)

○ 내 용

· 야간 디지털 테마파크 조성: 체류형 관광지 조성

· 관광편익시설 확충: 거점주차장 조성, 이용객 접근성 개선방안 마련 등

· 전망대 스토리텔링 강화: 관광 브랜드화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000		70	145	4,785
국 비
도 비	2,500			145	2,355
시 비	2,500		70		2,430
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 제7차 전북권 관광개발계획 반영                           : ‘21. 12.

○ 추경예산(설계비 시비 1억원) 반영                         : ‘24.  6.

○ 용역 착수                                                : ‘24. 11.

□ 향후계획

○ 용역완료                                                 : ‘25. 10.

○ 사업완료                                                 : ‘26. 12.

사업명

월명산전망대 및 관광객 쉼터조성

담당자

관광진흥과 유연태(☎454-3342)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시간여행마을권역, 서해낙조, 동백대교 등을 조망할 수 있는 전망대 조성

○ 새로운 랜드마크 조성으로 관광 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2026년

○ 위 치 : 신흥동 26-2번지(평화매점) 일원

○ 규 모 : 전망대 및 트래블라운지(거점형 복합관광안내소) 신축, 진입도로 개설(L=250m, B=9.2m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,135백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,135	1,790		3,549	3,796
국 비	1,050	574		476
도 비	450	377		73
시 비	7,635	839		3,000	3,796
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 월명산전망대 진입로 공사 준공                             : ‘22. 11.

○ 행정절차 이행 및 건축설계 완료                            : ‘25.  5.

○ 공사발주                                                  : ‘25.  7.

□ 향후계획

○ 전망대 운영·관리방안 마련 및 공사 준공                    : ‘26. 12.

사업명

K-관광섬 육성사업

담당자

관광진흥과 조윤관(☎454-3344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 비경을 자랑하는 고군산군도 등 서해안권 대표 명소화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023~2027년(5개년)

○ 위 치 : 옥도면 말도, 명도, 방축도 일원

○ 규 모 : 트레킹캠핑장 조성, 트레킹등대쉼터 조성, 트레킹숙소리모델링, 숲놀이터 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,500	80	541	6,043	4,836
국 비	5,000	50	444	2,403	2,103
도 비	1,500			870	630
시 비	5,000	30	97	2,770	2,103

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업공모신청 선정                                       : ‘23.  4.

○ 관광종합계획 수립용역                                   : ‘23.  8.~12.

○ 편의시설(화장실, 쉼터) 실시설계용역 착수                : ‘24.  8.

○ 하이트레킹 실행사업 대행용역 착수                       : ‘24.  9.

○ 경관조성공사 기본 및 실시설계용역 착수                  : ‘24. 11.

○ 브랜드개발 및 홍보 용역 착수                            : ‘24. 12.

○ 지역특화 도시락 및 디저트 개발용역 착수                 : ‘24. 12.

□ 향후계획

○ 공사 및 관련 용역 완료                                   : ‘27. 12.

□ 사업변경 내역

변경사항	당 초	변 경	변경사유
사업기간	2023~2026년	2023~2027년	주민협의 지연으로 사업기간 연장
사업내용	숙소리모델링 말도 캠핑장	숙소리모델링(축소) 명도 해안산책로 조성	추진 가능한 사업으로 대체

사업명

2024 군산짬뽕페스티벌

담당자

관광진흥과 안보름(☎454-3912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산짬뽕을 활용한 페스티벌 개최로 미식관광 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 11. 1.(토)~11. 2.(일)

○ 위 치 : 짬뽕특화거리(동령길 일원)

○ 내 용 : 짬뽕맛집체험, 세계이색짬뽕체험, 짬뽕푸드마켓, 시민참여프로그램,

개막식, 지역예술인공연 등 각종 먹거리·체험프로그램 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	630	180	150	150	150
국 비
도 비
시 비	630	180	150	150	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024년 군산 짬뽕페스티벌 개최완료

- 다양한 짬뽕 먹거리 및 짬뽕 관련 행사 추진으로 짬뽕특화사업 내실화

- 관내 중식당 및 소상공인 참여로 지역경제활성화 기여

- 관람인원: 약 6만명 / 만족도: 81% 이상 만족

□ 향후계획

○ 25년도 짬뽕페스티벌 개최 : ‘25. 10.

사업명

소룡동 도시재생뉴딜사업

담당자

도시재생과 최수현(☎454-3733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 주택 보수로 주변 환경개선과 생동감 넘치는 주거지 조성기여

○ 부족한 주민편익시설 확충을 통한 주거복지 실현 및 지역공동체 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025 (6년)

○ 위 치 : 소룡동 1393-166번지 일원

○ 규 모 : 76,975㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원(도 8,400, 시 5,600)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	14,000	8,351	1,218	4,431	-
국 비
시 도 비	8,400	5,469	719	2,212	-
시군구비	5,600	2,882	499	2,219	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ `24. 04. : 골목길 정비공사 준공

○ `24. 06. : 안전한 보행길 조성공사 준공

○ `24. 12. : 어울림센터 및 광장 조성공사 착공

□ 향후계획

○ `25. 하반기. : 창업점포 리모델링 설계용역 완료

집수리 지원사업 준공

어울림센터 및 광장 조성공사 준공

□ 사업변경 내역

(단위:백만원)

구 분	세부사업명	당초 계획(안)		변경 계획(안)		증(△)감			비고
총 계		-	14,000		14,000		-
경관 개선사업	소 계		680		790		110
	지붕수리 및 집수리	62가구	590	73가구	700	11가구	110		기간연장 (‘24~’25)
	연립주택 수리집원	3단지	90	3단지	90	-	-		완료
공영주차장 조성사업	소 계		302		302		-
	공영주차장 조성	456m2	302	456m2	302	-	-		완료
정주여건 개선사업	소 계		672		772		100
	소형공원 조성	222m2	439	222m2	439	-	-		기간연장 (‘24~’25)
	나눔텃밭 조성	205m2	122	465m2	222	260m2	100
	골목길 정비사업	445m2	111	445m2	111	-	-
안전한 소룡길 만들기	소 계		2,188		2,188		-
	안전한 보행길 조성	2,371m2	321	2,371m2	321	-	-		완료
	선형공원 조성	2,286m2	1,704	2,286m2	1,704	-	-
	아기자기 소룡길 만들기	1식	163	1식	163	-	-
마을길 확장사업	소 계		1,984		1,984		-
	마을길 확장 1구간	1,975m2	1,306	1,975m2	1,306	-	-		완료
	마을길 확장 2구간	720m2	678	720m2	678	-	-
어울림센터 조성사업	소 계		4,609		4,399		210
	어울림센터 조성	1,466m2 956.4m2	4,573	1,492m2 997.93m2	4,363	26m2 41.53m2	△210		추진중
	왁자지껄 공부방 운영	1식	36	1식	36	-	-		완료
어울림광장 조성사업	소 계		1,075		1,075		-
	어울림광장 조성사업	605m2	1,075	605m2	1,075	-	-		추진중
실버커뮤니티 센터 조성사업	소 계		958		958
	실버커뮤니티센터 조성	378m2	922	378m2	922	-	-		완료
	노인교실 운영	1식	36	1식	36	-	-
창업점포 조성사업	소 계		524		524
	창업점포 조성	260m2 100m2	458	1,492m2 121.5m2	458	연면적 21.5m2	-		위치변경 (어울림센터 1층)
	창업지원 컨설팅	1식	66	1식	66	-	-		완료
돌봄전문가 만들기	소 계		18		18
	돌봄전문가 육성	1식	18	1식	18	-	-		완료
주민역량 강화사업	소 계		344		344
	주민역량강화사업	1식	344	1식	344	-		-	완료
거버넌스 운영	소 계		198		198
	거버넌스 운영	1식	198	1식	198	-		-	완료
도시재생 현장지원센터 운영	소 계		238		238
	현장지원센터 운영	1식	238	1식	238	-		-	완료
활성화계획 수립 등	소 계		210		210
	활성화계획 수립 등	1식	210	1식	210	-		-	완료

사업명

삼학동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 조기성(☎454-3731)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전‧위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2025(5년)

○ 위 치 : 군산시 금광동 156-1번지 일원

○ 규 모 : 39,575㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,509백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,509	234	315	2,119
국 비	2,456	186	208	1,459
시 도 비	316	14	50	282
시군구비	737	34	57	378
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ `24. 12. : 마스터플랜 승인

□ 향후계획

○ `25. 하반기~ : 삼학동 새뜰마을사업마스터플랜 변경 및 사업기간 연장 추진

○ `25. 09 : 도시가스 개별 가구 인입 공사 완료

○ `25. 11 : 붕괴위험정비, 빈집 정비, 안전난간 공사 준공

○ `25. 11 : 집수리 및 슬레이트 지붕개량 사업 완료 및 정산

○ `25. 12 : 휴먼케어 및 주민역량강화 용역 2차분 완료

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

구암동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 최수현(☎454-3733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전‧위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024(5년)

○ 위 치 : 군산시 구암동 362-1번지 일원

○ 규 모 : 36,184㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,870백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,603	1,842	761	-	-
국 비	1,845	1,445	400	-	-
시 도 비	216	108	108	-	-
시군구비	542	289	253	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `24. 06. : 도시가스 공급시설 분담금 재협의 및 변경협약 체결

○ `24. 09. : 휴먼케어 및 주민역량강화 용역(2차분) 완료

○ `24. 12. : 도시가스 인입공사 완료 및 골목길 정비공사 준공

□ 향후계획

○ 사업완료

□ 사업변경 내역

(단위:백만원)

사업명	사업계획				비고
	당초		변경
	수량	사업비(백만원)	수량	사업비(백만원)
합계	-	2,870	-	2,870	변경없음
생활·위생인프라사업	-	2,371	-	1,769.5	△72
A-1. 태극기가로 조성사업	1식	28	1식	28	변경없음
A-2. 골목길 정비사업	1식	395.5	1식	467.5	△72
A-3. 구암동 이야기 만들기	1식	40	1식	40	변경없음
A-4. 경로당 리모델링사업	192㎡	751	192㎡	751	변경없음
A-5. 도시가스 인입공사	1식	483	1식	483	변경없음
안전확보사업	-	180	-	180	변경없음
A-7. CCTV 설치	5개소	120	5개소	120	변경없음
A-8. 보안등·가로등/제설함 설치	10개소/1개소	60	11개소/1개소	60	변경없음
주택정비지원사업	-	405	-	333	▽72
B-1. 슬레이트지붕 개량사업	수급자/일반	201	수급자/일반	59	▽142
B-2. 집수리사업	수급자/일반	204	수급자/일반	204	변경없음
B-3. 빈집정비사업	-	-	4호	70	△70
휴먼케어사업	-	115	-	115	변경없음
B-4. 문화프로그램 운영	1식	85	1식	85	변경없음
B-6. 건강밥상 요리교실	1식	30	1식	30	변경없음
주민역량강화사업	-	100	-	100	변경없음
C-1. 마을운영 컨설팅	1식	20	1식	20	변경없음
C-2. 마을발전포럼	1식	20	1식	20	변경없음
C-3. 고령자 재취업교육	1식	20	1식	20	변경없음
C-4. 고령자 한글교실	1식	40	1식	40	변경없음
기타사업	-	372.5	-	372.5	변경없음
D-1. 마스터플랜 수립	1식	160	1식	160	변경없음
D-2. 경관계획 수립	1식	50	1식	50	변경없음
D-3. 실시설계 용역	1식	100	1식	100	변경없음
D-4. 총괄코디네이터 운영	1식	42.5	1식	42.5	변경없음
D-5. 마을활동가 운영	1식	10	1식	10	변경없음
D-6. 거버넌스 운영	1식	10	1식	10	변경없음

사업명

선양동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 최수현(☎454-3733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전‧위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026(5년)

○ 위 치 : 군산시 선양동 925-76번지 일원

○ 규 모 : 74,201㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,820	171	506	1,065	2,078
국 비	2,670	165	314	749	1,442
시 도 비	345	6	57	90	192
시군구비	805	-	135	226	444
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ `24. 05. ~ 08. : 건강길 및 주차장, 공동화장실 신축 설계용역 완료

○ `24. 08. : 빈집철거공사 착공

○ `24. 10. : 건강길 및 주차장 조성공사 착공

○ `24. 11. : 선양동 새뜰마을사업 마스터플랜 경미한 변경 승인

□ 향후계획

○ `25. 하반기 : 주택정비지원사업(슬레이트지붕개량, 집수리) 시행

공동화장실 철거 및 신축공사 준공

선명경로당 리모델링, 골목길 정비, 계단 및 옹벽정비공사                       실시설계용역 발주

도시가스 공급관로 협약 체결

□ 사업변경 내역

(단위:백만원)

사업명	사업계획				비고
	당초		변경
	수량	사업비(백만원)	수량	사업비(백만원)
합계	-	3,820	-	3,820	변경없음
안전확보사업	-	1,188	-	1,233.4	△45
A-1. 계단정비사업	200㎡	58.5	200㎡	58.5	변경없음
A-2. 옹벽정비사업	80m	10	80m	10	변경없음
A-3. 골목길정비사업	850㎡	604	850㎡	604	변경없음
A-4. 건강길정비사업	1,200㎡	243.9	1,200㎡	243.9	변경없음
A-5. CCTV 설치공사	9개소	108	8개소	153	△45
A-6. 가로등, 유도등, 제설함 설치	1식	131	1식	131	변경없음
A-7. 비상소화장치	6개소	33	6개소	33	변경없음
생활·위생인프라개선사업	-	1,815.2	-	1,635.8	▽179
A-8. 소광장조성사업	400㎡	420.9	400㎡	420.9	변경없음
A-9. 도시가스인입공사	1,200m	330	1,200m	330	변경없음
A-10. 주차장조성사업	587㎡	189	587㎡	189	변경없음
A-11. 선명경로당 신축	161㎡	670.7	81㎡	491.3	▽179
A-12. 공동화장실 설치	66㎡	204.6	66㎡	204.6	변경없음
주택정비지원사업	-	325.2	-	459.6	△134
B-1. 빈집정비사업	4호	54.4	4호	54.4	변경없음
B-2. 슬레이트지붕 개량사업	13호	113.3	13호	123.2	△10
B-3. 집수리사업	30호	157.5	30호	282	△124
휴먼케어사업	-	106	-	106	변경없음
C-1. 고령자 재취업교육	1식	21.2	1식	21.2	변경없음
C-2. 문화·건강 프로그램	1식	30.9	1식	30.9	변경없음
C-3. 생활·안전 프로그램	1식	30.9	1식	30.9	변경없음
C-4. 원예치료프로그램	1식	23	1식	23	변경없음
주민역량강화사업	-	60	-	60	변경없음
C-5. 사업모니터링	1식	20	1식	20	변경없음
C-6. 마을지킴이양성	1식	20	1식	20	변경없음
C-7. 준공백서제작	1식	20	1식	20	변경없음
기타사업	-	325	-	325	변경없음
D-1. 제경비	1식	325	1식	325	변경없음

사업명

서군산 복합체육센터 건립사업

담당자

체육진흥과 온혜영(☎454-3295)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부족한 체육 인프라 구축

○ 부족한 서군산 지역의 체육시설 불균형 해소 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2024.

○ 위 치 : 군산시 산북동 3350번지 일원

○ 규 모 : 부지 19,918㎡, 연면적 8,452㎡, 지하1층/ 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2025년 이후
계	28,000	23,100	4,900	-	-
국 비	5,000	5,000	-	-	-
시 도 비	3,400	2,500	900	-	-
시군구비	19,600	15,600	4,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지방재정(중앙)투자심사 심의                              : ‘19. 11월

○ 공공건축지원센터 건축계획 사전검토 심의                  : ‘20.  4월

○ 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수             : ‘20.  9월 ~ ‘21.  9월

○ 서군산 복합체육센터 건립공사 착공                        : ‘22.  1월

○ 서군산 복합체육센터 건립공사 준공                        : ‘24. 11월

□ 향후계획

○ 실내수영장 시범 운영                                     : ‘24. 12월

○ 서군산 복합체육센터 개관식                               : ‘25.  7월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군산새만금국제마라톤대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제대회 개최를 통해 군산 육상의 기량을 높일 수 있는 계기로 대한민국

육상 중흥을 위한 기틀 마련

○ 엘리트 선수들과 생활체육 동호인들이 함께 참여해 시민 건강과 체력증진

및 건전한 여가 활동에 기여하고 스포츠와 군산시 관광자원의 연계를

통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 4. 14.(일)

○ 위 치 : 군산시 일원(월명종합운동장 집결)

○ 규 모 : 총10,000여명(참가자 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,790백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,790	880	900	1,110	900
국 비	210			210
시 도 비	400	100	100	100	100
시군구비	3,180	780	800	800	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `23. 12월 : 대회 개최 승인

○ `24.  1월 ~ 3월 : 대회 종합추진계획 수립, 참가자 모집 및 업무협의

○ `24.  4. 14. : 2024 군산새만금국제마라톤대회 개최

□ 향후계획

○ `24. 10월 : 대회 개최 승인

○ `25.  4.  4. : 2025 군산새만금마라톤대회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군산새만국제철인3종경기대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산군도 등 천혜의 관광자원을 보유하고 있는 군산 새만금을 국제적으로

홍보하고 지역경제 활성화에도 크게 기여

○ 참가선수와 시민이 함께 어우러질 군산시의 대표적 축제로 자리매김하여

군산시를 복합 스포츠 문화도시로 도약시키는 발판 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 6. 2.(일)

○ 위 치 : 비응항 및 새만금방조제 일원

○ 규 모 : 3,000여명(참가자 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,274백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	1,274	260	494	260	260
국 비	234		234
시 도 비	240	60	60	60	60
시군구비	800	200	200	200	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `23. 10월 : 대회 개최 승인

○ `23. 12월 : 지자체 개최 국제경기대회 공모사업 선정(국비 234백만원)

○ `24.  1월 ~ 5월 : 참가자 모집 및 유관기관 협의

○ `24.  6. 1. ~ 6. 3. : 2024 군산새만금국제철인3종경기대회 개최

□ 향후계획

○ `24. 10월 : 대회 개최 승인

○ `25.  8월 : 2025 군산새만금국제철인3종경기대회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

금석배전국학생축구대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 학생축구대회에서 메이저급 대회로 故 채금석 선생님의 이름을 딴 대회로 한국 축구의 중흥과 우수한 선수 발굴목적으로 개최되는 품격 높은 대회

○ 금석배 축구대회의 명성에 부합한 원활한 행사 운영으로 축구메카 도시로서의 이미지 제고 및 축구 꿈나무 발굴 육성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 연중 3회(초등 7월/중등 2월/고등 5월)

○ 위 치 : 군산시 일원(월명/대야/서군산/금강/교통공원)

○ 규 모 : 총195팀(초등 61개팀/중등 65개팀/고등 69개팀

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,460	900	840	860	860
국 비
시 도 비	460	150	90	110	110
시군구비	3,000	750	750	750	750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `23. 12월 : 대한축구협회 대회 개최 승인

○ `24.  2. 16. ~ 2. 29. : 2024 금석배 전국중학생축구대회 개최

○ `24.  5. 31. ~ 6. 14. : 2024 금석배 전국고등학생축구대회 개최

○ `24.  7. 22. ~ 7. 28. : 2024 금석배 전국초등학생축구대회 개최

□ 향후계획

○ `24. 12월 : 대한축구협회 대회 개최 승인

○ `25년 2월/5월7월 : 2025 금석배 전국학생축구대회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

새만금 전국인라인마라톤대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 인 라인마라톤대회의 새만금 일원 개최를 통해 세계 최장 새만금 방조제와

군산시를 전국적으로 알리고 인라인 선수 및 동호인의 저변확대

○ 수준 높은 대회를 통한 지역경제 활성화와 국내‧외 선수 및 동호인이 참여하는

품격 높은 축제의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 6. 9.(일)

○ 위 치 : 새만금방조제 일원

○ 규 모 : 5,000여명(선수 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 780백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	780	220	200	180	180
국 비
시 도 비	420	120	100	100	100
시군구비	360	100	100	80	80
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `24.  2월 : 대회 개최 승인(대한롤러스포츠연맹)

○ `24.  3월 ~ 5월 : 추진계획수립 및 참가자 모집 홍보

○ `24.  6.  9. : 2024년 제8회 군산새만금전국인라인마라톤대회 개최

□ 향후계획

○ `25.  2월 : 대회 개최 승인(대한롤러스포츠연맹)

○ `25.  6.  8. : 2025 제9회 군산새만금전국인라인마라톤대회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

KPGA 군산오픈 골프대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 최대 규모 81홀을 갖춘 골프장 인프라 시설을 활용하고, 프로대회

(KPGA) 유치를 통해 골프를 우리시 특화종목으로 자리매김

○ 스포츠와 군산시 관광자원의 연계를 통해 방문객들의 만족도를 높이고

이를 통해 방문객들의 재방문을 유도하여 지역경제 활성화에 이바지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 7. 11.(목) ~ 7. 14.(일)

○ 위 치 : 군산컨트리클럽

○ 규 모 : 1부 투어 선수 145명, 갤러리 1만여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 436백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	436	112	112	100	112
국 비
시 도 비	48	12	12	12	12
시군구비	388	100	100	88	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `24.  2월 : 대회 개최(일정) 승인(한국프로골프협회 이사회)

○ `24.  3월 ~ 6월 : 유관기관 협의 및 종합지원계획 수립

○ `24.  7. 11. ~ 7. 14. : 2024 KPGA 군산CC 오픈 개최(4일간)

□ 향후계획

○ `25.  2월 ~ 4월 : 대회 개최 일정 협의

○ `25.  9월 : 2025 KPGA 투어 경기 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

전국스포츠클라이밍대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 스포츠클라이밍 동호인 화합과 향후 발전을 도모하며, 강인한 체력을 바탕으로 도전정신을 고취

○ 2020년 소룡동 인공암장 시설확충 및 개선사업 완료 후 군산클라이밍센터를 전국에 알리고 활성화하여 클라이머들의 방문으로 지역경제활성화에 이바지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 6. 1.(토) ~ 6. 2.(일), 2일간

○ 위 치 : 군산클라이밍센터

○ 규 모 : 600여명(선수 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 530백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	530	140	130	130	130
국 비
시 도 비	130	40	30	30	30
시군구비	400	100	100	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `24.  2월 : 대회 개최(일정) 승인

○ `24.  3월 ~ 5월 : 참가자 모집 및 유관기관 협의

○ `24.  6.  1. ~ 6.  2. : 제15회 고미영컵 전국청소년스포츠클라이밍대회 개최

□ 향후계획

○ `24. 11월 ~ 12월 : 대회 개최 일정 협의

○ `25.  3월 : 2025년 전국 스포츠클라이밍 선수권 대회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

국제 및 전국대회 개최 지원

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금석배 전국학생축구대회 등 우리시 개최 국제·전국 규모 대회의 원활한

운영을 위해 임시적 행사시설물 설치·구축 지원

○ 대규모 체육행사의 사전 홍보 및 준비를 통해 성공적인 대회 개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1월 ~ 12월(연중)

○ 위 치 : 군산시 일원

○ 규 모 : 총16개 국제 및 전국규모 대회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 816백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	816	164	216	211	225
국 비
시 도 비
시군구비	816	164	216	211	225
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `23.  9월 : 2024년 국제 및 전국규모 체육대회 추진계획 수립

○ `24.  1월 : 2024년 국제 및 전국규모 체육대회 종합지원계획 수립

○ `24.  1월 ~ 12월 : 국제 및 전국대회 개최 지원(홍보 및 안전시설 등)

□ 향후계획

○ `25.  9월 : 2025년 국제 및 전국규모 체육대회 추진계획 수립

○ `25.  1월 : 2025년 국제 및 전국규모 체육대회 종합지원계획 수립

○ `25.  1월 ~ 12월 : 2025년 국제 및 전국대회 개최 지원

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

신역세권 공영주차장 조성

담당자

스마트도시과 이우석(☎454-3812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신역세권 택지개발지구 내 군산역 등 교통유발요인으로 교통량 및

주차수요가 폭증할 것으로 예상되어 주차난 해소를 위한 공영주차장 확보

○ 주차장 조성을 통해 쾌적한 주차여건 및 주변 환경개선 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 군산시 내흥동 912-1번지

○ 규 모 : 신역세권(P3) 공영주차장 조성 1식(A=1,794㎡, 주차 60면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,012백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,012	0	1,709.5	302.5	0
국 비
시 도 비	1,006	0	854.75	151.25	0
시군구비	1,006	0	854.75	151.25	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ `24년 신역세권 공영주차장(P3) 투자심사 완료             : `23. 10.

○ `24년 신역세권 공영주차장(P3) 토지매입                  : `24.  2.

○  실시설계용역 추진                                       : `24.  3.

○  신역세권 공영주차장(P3) 조성공사 착공                  : `24.  8.

○ `24년 신역세권 공영주차장(P3) 조성공사 준공             : `24. 12.

□ 향후계획

○ 신역세권 공영주차장(P3) 편익시설 설치공사 추진         : `25. 8. ~

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

광역해양레저체험 복합단지 조성사업

담당자

항만해양과 남호준(☎454-2813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산군도의 다양한 해양자원을 활용한 통합 관광인프라 조성

○ 해양레저시설 확충을 통한 관광수요 창출로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2025년

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 산65번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 64,365㎡(단지 59,674㎡ 진입도로 4,691㎡), 건축 2동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	38,690	11,792	11,728	15,170	-
국 비	19,345	5,896	5,864	7,585	-
시 도 비	5,532	1,768	1,760	2,304	-
시군구비	13,813	4,128	4,104	5,281	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 소규모환경영향평가 협의 완료(환경부)                   : `22. 4.

○ 환경영향평가(환경부) 및 중토위 등 관계기관 협의 완료   : `22. 5.

○ 새만금개발 통합심의위원회 안건심의(새만금개발청)       : `22. 7.

○ 해양관광 SOC사업 시행계획 승인(전라북도)              : `22. 10.

○ 새만금 용도별 통합개발계획 승인, 고시(새만금개발청)    : `22. 12.

○ 본단지 공사 발주 의뢰 및 입찰공고                      : `23. 1.~6.

○ 본단지 공사 착공                                       : `23. 8.

○ 전기, 소방, 통신공사 착공 및 감리단 선정                : `24. 6.

○ 본단지 관리위탁 수탁자 선정                            : `25. 7.

□ 향후계획

○ 공사 준공 및 (시범)운영 : `25. 9.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : (당초) 부지면적 64,771㎡  (변경) 부지면적 64,365㎡

○ 사업기간 : (당초) 2019 ~ 2023년     (변경) 2019 ~ 2025년

사업명

말도~방축도 인도교 개설사업

담당자

항만해양과 윤용묵(☎454-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인도교와 말도리 도서의 지역자원경관을 연계한 명품트레킹 코스개발하여 관광활성화로 지역소득증대 및 군산시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2025.

○ 위 치 : 말도~명도~방축도 일원

○ 규 모 : 인도교 4개소, L=1,356m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,970백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	33,970	33,970	30,520	3,450
국 비	24,260	24,260	21,500	2,760
시 도 비	3,032	3,032	2,687	345
시군구비	6,678	6,678	6,678	345
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 제4교(광대도~방축도) 완료                               : 2018. 11.

○ 제1교(말도~보농도), 2교(보농도~명도) 완료                : 2022. 10.

○ 제3교(명도~광대도) 공사 착공                            : 2022. 12.

○ 제3교(명도~광대도) 기초공 완료                          : 2025. 06.

□ 향후계획

○ 제3교(명도~광대도) 상부공 완료                          : 2025. 08.

○ 제3교(명도~광대도) 부대공 완료                          : 2025. 09.

○ 말도~명도~방축도 트레킹코스 개통                       : 2025. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

섬마을단위 LPG시설 구축사업

담당자

항만해양과 동상률(☎454-2936)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬마을 내 안정적인 연료수급을 통해 난방 및 취사 등 연료문제 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2025.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 어청도, 개야도

○ 규 모 : 세대별 LPG배관망 구축  *어청도 120세대, 개야도 230세대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,597백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,597	1,807	1,700	90
국 비	2,518	1,265	1,190	63
시 도 비
시군구비	1,079	542	510	27
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 어청도 LPG시설 구축완료                             : 2023.  9.

○ 개야도 공사 착공                                     : 2024. 11.

□ 향후계획

○ 개야도 시설공사 완료 및 가스공급                     : 2025. 10.

□ 사업변경 내역

○ 가스공급 세대수 변경

- 어청도(당초) 114세대, (변경) 120세대

- 개야도(당초) 219세대, (변경) 230세대

사업명

어촌정주어항(무녀1구) 건설

담당자

항만해양과 이꽃뜰(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴하는 어촌지역의 어항기반시설 확충으로 소득증대 및 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2024. (8개년)

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 무녀1구항 일원

○ 규 모 : 어촌정주어항 개발 A=12,307㎡

- 준설(9,908㎡), 매립(7,633㎡), 물양장 88m, 호안 162m, 부잔교 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,500	9,500	0	0	0
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	7,600	7,600	-	-	-
시군구비	1,900	1,900	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공유수면 매립 기본계획 반영(8,940㎡) 확정(해수부)    : ‘17. 5.

○ 무녀1구항 공유수면 매립면허(7,633㎡) 승인            : ‘19. 10.

○ 무녀1구 정주어항 개발공사 착공                       : ‘18. 11.

○ 무녀1구 정주어항 개발공사(4차분) 준공                : ‘23. 3.

○ 무녀1구 정주어항 준설공사 준공                       : ‘24. 6.

○ 무녀1구 부잔교 및 도교 설치공사 준공                 : ‘24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

선유1구항 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 이꽃뜰(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유1구 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,907백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,907	3,907	0	0	0
국 비	2,735	2,735	-	-	-
시 도 비	352	352	-	-	-
시군구비	820	820	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 1.

○ 생활SOC사업 공사 추진                               : `21. 8.

○ 공통사업 준공                                        : `23. 1.

○ 특화사업 준공                                        : `24. 6.

○ S/W사업 및 뉴딜사업 준공                            : `24. 12.

□ 향후계획

○ 사업정산                                              : `25. 08.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장자도 장자어화 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 이도승(☎454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 장자도리 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,441백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	14,441	14,441	0	0	0
국 비	10,109	10,109	-	-	-
시 도 비	1,300	1,300	-	-	-
시군구비	3,032	3,032	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 1.

○ 생활SOC사업 공사 추진                               : `21. 8.

○ 공통사업 준공                                        : `23. 12.

○ 특화사업 준공                                        : `24. 12.

○ S/W사업 및 뉴딜사업 준공                            : `24. 12.

□ 향후계획

○ 사업정산                                              : `25. 08.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

노을과 가락의 섬 비안도 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 이꽃뜰(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 비안도항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,173백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	12,173	12,173	0	0	0
국 비	8,521	8,521	-	-	-
시 도 비	1,095	1,095	-	-	-
시군구비	2,557	2,557	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 1.

○ 토목분야 공사 추진                                   : `22. 3.

○ 특화사업 착공                                        : `22. 10.

○ 특화사업 준공                                        : `24. 6.

○ 토목분야 공사 준공                                   : `24. 12.

○ S/W사업 및 뉴딜사업 준공                            : `24. 12.

□ 향후계획

○ 사업정산                                              : `25. 08.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

두리도항 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 이꽃뜰(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 두리도항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,300	6,300	0	0	0
국 비	4,410	4,410	-	-	-
시 도 비	567	567	-	-	-
시군구비	1,323	1,323	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수                           : `21. 7.

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `22. 7.

○ 시행계획 수립, 특화사업 공사 추진                    : `23. 8.

○ 공통사업 공사 완료                                   : `24. 6.

○ 특화사업 및 S/W사업 준공                            : `24. 12.

□ 향후계획

○ 사업정산                                              : `25. 08.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

서래포구 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 이도승(☎454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 서래포구 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,460	10,460	0	0	0
국 비	7,323	7,323		-	-
시 도 비	942	942		-	-
시군구비	2,195	2,195		-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 12.

○ 생활환경SOC사업 공사 착공                           : `22. 9.

○ 특화사업 세부설계용역 착수                           : `22. 10.

○ 공통사업 공사 완료                                   : `23. 12.

□ 향후계획

○ 특화사업 공사 착공                                  : `25. 4.

○ 특화사업 및 S/W사업 준공                           : `25. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

야미도항 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 이도승(☎454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 야미도항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,630	5,422	5,208	0	0
국 비	7,441	3795	3,646		-
시 도 비	957	488	469		-
시군구비	2,232	1,139	1,093		-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `22. 11.

○ 토목분야 설계용역 완료                               : `24. 6.

○ 건축분야 설계용역 완료                               : `24. 6.

□ 향후계획

○ 기본계획 변경 및 시행계획 수립                       : `25. 7.

○ 뉴딜사업 공사착공                                    : `25. 8.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

명도 경사식 선착장 조성사업

담당자

항만해양과 이도승(☎454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서환경 급변에 따라 도서지역 내 어항의 기능이 어업과 도서관광 등으로 다변화되어 지역특성을 반영한 어항개발 필요

○ 여객선 운항 노선 중 차도선 선착장이 없는 경사식 선착장을 조성하여, 항내 정온도 및 피항지 확보로 주민 정주여건 및 편익증진 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 말도리 명도항 일원

○ 규 모 : 경사식 선착장 조성(L=80m, B=10m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,000	1,400	3,600	1,000	0
국 비	1,200	1,200	-	-	-
시 도 비	3,840	160	2,880	800	-
시군구비	960	40	720	200	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 1차분 공사착공                                       : `24. 3.

○ 콘크리트 블록 및 T.T.P제작완료                       : `24. 12.

□ 향후계획

○ 블록거치 및 해상공사 추진                            : `25. 2.

○ 2차분 공사착공                                       : `25. 4.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어촌신활력증진사업

(무녀도,신시도,야미도)

담당자

항만해양과 이꽃뜰(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌지역 전체 57.9% 소멸위험지역 차지. 낮은 소득과 한정된 일자리‧생활 서비스 부족 등 열악한 정주여건으로 인구유출 심화

○ 300개 어촌 대상 어촌주민을 위한 경제‧교육‧문화‧의료 일자리 등 경제‧생활 플랫폼‧안전 인프라 전반 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도, 신시도, 야미도 일원

○ 규 모 : 앵커조직, 임대주택, 어촌스테이션 등 어촌생활여건 개선 및

일자리 창출 지원(생활플랫폼 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,000	1,000	1,000	3,650	4,350
국 비	7,000	700	700	2,800	2,800
시 도 비	900	90	90	360	360
시군구비	2,100	210	210	490	1,190
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 신규사업 공모 선정                                   : `23. 1.

○ 앵커조직 위·수탁 협약체결                            : `23. 8.

○ 기본계획 수립용역 착수                               : `23. 11.

□ 향후계획

○ 기본계획 심의신청                                    : `25.  9.

○ 기본계획 완료 및 신활력증진사업 연차별 사업추진      : `25. 11.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어촌신활력증진사업

(선유도,장자도,대장도,관리도)

담당자

항만해양과 이꽃뜰(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌지역 전체 57.9% 소멸위험지역 차지. 낮은 소득과 한정된 일자리‧생활 서비스 부족 등 열악한 정주여건으로 인구유출 심화

○ 300개 어촌 대상 어촌주민을 위한 경제‧교육‧문화‧의료 일자리 등 경제‧생활 플랫폼‧안전 인프라 전반 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도, 신시도, 야미도 일원

○ 규 모 : 앵커조직, 임대주택, 어촌스테이션 등 어촌생활여건 개선 및

일자리 창출 지원(생활플랫폼 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,000	1,000	1,000	3,650	4,350
국 비	7,000	700	700	2,800	2,800
시 도 비	900	90	90	360	360
시군구비	2,100	210	210	490	1,190
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 신규사업 공모 선정                                   : `23.  1.

○ 앵커조직 위·수탁 협약체결                            : `23.  8.

○ 기본계획 수립용역 착수                               : `23. 11.

□ 향후계획

○ 기본계획 심의신청                                    : `25.  8.

○ 기본계획 완료 및 신활력증진사업 연차별 사업추진      : `25. 10.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어촌신활력증진사업(유형3-관리도항)

담당자

항만해양과 이꽃뜰(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌지역 전체 57.9% 소멸위험지역 차지. 낮은 소득과 한정된 일자리‧생활 서비스 부족 등 열악한 정주여건으로 인구유출 심화

○ 300개 어촌 대상 어촌주민을 위한 경제‧교육‧문화‧의료 일자리 등 경제‧생활 플랫폼‧안전 인프라 전반 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 관리도리 일원

○ 규 모 : 방파제 연장, 등산로 및 도로 정비, 녹지 조성 등(안전인프라 개선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	650	1,449	2,901	0
국 비	3,500	455	1,015	2,030	-
시 도 비	450	59	130	261	-
시군구비	1,050	136	304	610	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 신규사업 공모 선정                                   : `23. 1.

○ 기본계획 및 시행계획 용역 착수                       : `23. 10.

○ 기본계획 자문 및 심의(해수부)                         : `23. 12.

○ 기본계획 수립                                        : `24. 2.

○ 시행계획 완료                                        : `24. 12.

□ 향후계획

○ 토목공사 착공                                        : `25. 8.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

새만금 수산식품 수출가공 종합단지 해수 인·배수 기반 조성사업

담당자

수산산업과 공길후(☎454-3033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새만금 수산식품 수출가공단지의 성공적 유치 및 조기 활성화를 위한 필수 기반 시설인 해수 인·배수시설 설치가 필요

○ 단지내 해수공급으로 다양한 마른김 공장, 원물(해수어종) 세척 및 시제품 개발 등 해수어 신선가공을 통한 다양한 수출품목확대 및 품질향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2026년 (4년)

○ 위 치 : 새만금 국가산업단지 제2공구 산46번지 일원

○ 규 모 : 새만금 수산식품 수출가공 종합단지 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,126백만원(‘25년 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	16,126	246	1,167.4	7,507.4	7,205.2
시 도 비	2,700	-	293.4	2,072.2	2,161.6
시군구비	12,826	246	874.0	4,835.2	5,043.6
기 타	600	-	-	600	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33.4%)

○ 부지매입 완료

○ 기본 및 실시설계용역 완료

○ 공유수면 점사용허가 및 실시계획 승인 완료

○ 공사 착공 및 추진

○ 건설사업관리용역 착수 및 추진 중

□ 향후계획

○ 1차분 공사 연내 준공

○ 2026년 2차분 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2022(9월) ~ 2023년 → (변경) 2023 ~ 2026년

사업명

새만금 스마트 수산가공종합단지 조성사업

담당자

수산산업과 김지완(☎454-3032)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전북 수산식품산업의 영세성 극복과 글로벌 식품산업의 급성장 추세 대응 위해 R&D 기반, 수산가공 종합단지 조성으로 미래수산식품 신산업 대응

○ 새만금사업으로 위축된 수산업 활성화를 위해 새만금과 수산업의 상생 협력 수산식품 신산업 개발필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026년 (5년)

○ 위 치 : 새만금 국가산업단지 제2공구 산46번지 일원

○ 규 모 : 수산식품 R&D 및 협력지원센터, 스마트아파트형 가공공장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,339백만원 (*부지매입비 50억원 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	43,339	8,124	-	7,940	27,275
국 비	26,837	2,460	-	5,558	19,092
시 도 비	3,451	199	-	715	2,455
시군구비	13,051	5,465	-	1,667	5,728
지 방 채	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료(24.12월)

○ 조달청 설계적정성검토 및 기재부 총사업비 조정 협의완료(25. 2~6월)

○ 시공업체 선정, 조달청 발주의뢰(25. 7월)

□ 향후계획

○ 공사 착공식(9월)

○ 기초공사 1차분(9~12월) (가설공사, 토목공사 )

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2022 ~ 2025년 → (변경) 2022 ~ 2026년

사업명

새만금 수산식품단지 기반시설 조성사업

담당자

수산산업과 공길후(☎454-3033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새만금부지 상생 방안에 따른 단지내 필수 인프라 시설(수도, 전기 등) 및 내부도로가 없어, 내부도로로 조성하여 기업유치 및 수산식품단지 집적화 단지를 조성하고자함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2026년 (3년)

○ 위 치 : 새만금 국가산업단지 제2공구 산46번지 일원

○ 규 모 : 내부도로(폭=15m, 길이 608m) 및 기반시설(상·하수도 등) 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,056백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,056	0	438.6	3,617.4	0
시 도 비	1,000	-	-	1,000	-
시군구비	2,190	-	123.6	2,066.4	-
기 타 (발전소특별회계)	866	-	315	551	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13.2%)

○ 부지매입

○ 실시설계용역 완료

○ 사도개설허가 완료

○ 1차분 공사 착공 및 추진

○ 건설사업관리용역 착수 및 추진

□ 향후계획

○ 1차분 공사 추진 및 준공

○ 2025년 하반기 2차분 공사 추진 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업비 증액에 따른 지방재정 투자심사 완료

사업명

새만금 수산식품단지 공동배출 정화시설 조성사업

담당자

수산산업과 공길후(☎454-3033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마른 김 가공공장에서 발생된 세척수의 공동 정화 및 배출시설을 조성하여 새만금 수산식품 단지내 김산업 활성화

○ 비응항 인근해역의 색도 제거된 세척수 배출하여 친환경 수산식품단지를 조성 하고자함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2026년 (3년)

○ 위 치 : 새만금 국가산업단지 제2공구 산46번지 일원

○ 규 모 : 마른김 세척수 공동배출시설 1식

- 세척수 ➠ 드럼스크린(찌꺼기제거) ➠ 오존처리(색도저감) ➠ 방류

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,000	-	-	3,000	0
시 도 비	900	-	-	900	-
시군구비	2,100	-	-	2,100	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23.4%)

○ 부지매입 완료

○ 기본 및 실시설계용역 완료

○ 공유수면 점사용허가 및 실시계획 승인 완료

○ 공사 등 착공 및 추진

○ 건설사업관리용역 착수 및 추진 중

□ 향후계획

○ 2026년 공사 추진 및 준공

사업명

저온·친환경 위판장 현대화 사업

담당자

수산산업과 남세윤(☎454-2802)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저온·친환경 위판장 현대화 사업을 통해 수산물의 안전성 및 신선도 향상

○ 기후변화에 따른 난류성 어종 증가 및 비응항 확장개발에 따른 접안 및

위판 어선증가 예상으로 위판장 인프라 및 물류기반 조성 확대 필요

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년

○ 사업위치 : 군산시수협 비응항위판장(군산시 비응도동 105번지 일원)

○ 총사업비 : 6,000백만원(국 3,000 / 도 540 / 시 1,260 / 자 1,200)

○ 사업규모 : 총연면적 6,126.84㎡ / 부지면적 14,207.70㎡

- 위판장 공사 : 연면적 4,263.84㎡, 부지면적 9,934.00㎡

- 저빙시설(얼음 냉동창고) 공사 : 연면적 1,863.00㎡, 부지면적 4,273.70㎡

○ 주요내용 : 저온・친환경 위판장으로 현대화하여 저온유통 체계 구축

- 저온 친환경 위판장(선도 15℃ 유지) : 선어위판장, 활어위판장, 선별장 구축

- 얼음 저빙시설 : 기존 제빙·저빙공장과 별개로 저빙시설 추가 구축

- 부대시설 : 금융시설, 위판사무실, 노조사무실, 어업인 회의실·휴게실 등 구축

<저온·친환경 위판장 현대화사업 조감도>

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,000	-	218	2,700	3,082
국 비	3,000	-	109	1,350	1,541
시 도 비	540	-	19.6	243	277.4
시군구비	1,260	-	45.8	567	647.2
민간자본	1,200	-	43.6	540	616.4

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 저온·친환경 위판장 사업 공모 선정 : ‘23. 11. 3.

○ ‘24년 정기 1차 중앙·도 지방재정투자심사 제출 : ‘23. 12. 12.

○ ‘24년 지방재정투자심사 결과통보(결과 : 승인) : ‘24. 3. 13.

○ 실시설계 업체 계약 체결(군산시수협) : ‘24. 5. 13.

- 업 체 명 : ㈜휘츠엔지니어링건축사무소(안양시 소재)

- 계약기간 : ‘24. 5. 13. ~‘24. 11. 8.

○ 저온·친환경 위판장 사업계획 변경(냉동창고 확장) 요청 : ‘24. 6.

- 사업계획 변경 승인(해양수산부) : ‘24. 10.

○ 저온·친환경 위판장 실시설계 완료 : ‘24. 11.

○ 저온·친환경 위판장 실시설계 조달청 적정성 검토 의뢰 : ‘24. 11.

- 조달청 결과회신(실시설계 75건 개선사항 제안)  : ‘25. 1. 20.

○ 저온·친환경 위판장 실시설계 수정(조달청 검토의견 반영 및 수정) : ‘25. 2.

○ 실시설계 군산시 일상감사 검토 완료(적합) : ‘25. 2.

○ 비관리청 항만공사 사전승인 절차 추진(결과 : 승인)  : ‘25. 2. ~ 4.

○ 조달청 공사발주 의뢰(건축, 전기등) : ‘25. 4. ~ (진행중)

- (조달청) 전기공사업체 개찰 : ‘25. 6.

- (조달청) 건축, 소방 등 기술검토 진행중 : ‘25. 7.

- (조달청) 원가산정 후 발주예정 : ‘25. 7.~ 8.

□ 향후계획

○ 감리·시공업체 선정 및 계약    : ‘25. 7.~ 8.

○ 저온·친환경 위판장 착공(예정) : ‘25. 8.

○ 저온·친환경 위판장 준공(예정) : ‘26. 상반기

사업명

수산물종합센터 건어매장 신축

담당자

수산산업과 김주연(☎454-5733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양수산 복합공간 조성사업에서 제외된 노후 건어매장을 신축하여 위생적인

판매환경 조성으로 전통시장의 이미지 개선과 지역상권 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2025 (2년)

○ 위 치 : 군산시 내항2길 216(금동)

○ 규 모 : 임시건어매장 운영(연면적 750㎡), 기존 건어매장 철거(연면적 789.68㎡)

및 판매시설 신축(연면적 824.97㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,370백만원(도 1,000 시 1,370)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,370	2,370	64.2	800	-
시 도 비	1,000	1,000	32.1	-
시군구비	1,370	1,370	32.1	800	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본 및 실시설계

○ 임시건어매장 설치 및 임시영업 개시

○ 기존 건어매장 철거공사 착공 및 준공

○ 건어매장 신축공사 착공

□ 향후계획

○ 신축 건어매장 준공 및 운영개시

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2024년 → (변경) 2024 ~ 2025년

사업명

수산물 직거래장터

담당자

수산산업과 남세윤(☎454-2802)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고물가로 인하여 위축된 수산물의 소비촉진을 위하여 지역 특화수산물의       저렴한 가격으로 소비자에게 제공함으로써 소비 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 11.

○ 사업위치 : 군산시 관내, 서울(서울국회의사당, 안국역 동행상회)

○ 총사업비 : 140백만원(도비 70, 시비 70)

○ 사업규모 : 5개 행사

○ 사업대상 : 어업인, 생산자단체, 수협, 수산물 가공업체 등

○ 사업내용 : 수산물 할인행사, 무료 시식회, 홍보 기획전 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	200	-	140	30	30
시 도 비	88	-	70	9	9
시군구비	112	-	70	21	21

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 5개 수산물 직거래장터 완료

연번	행사명	기 간	장 소	참가규모	비 고
1	군산 롯데몰 설명절 직거래장터	‘24.2.2.~2.6. (6일)	군산시 롯데몰 (1층로비)	수산분야 6개소(32품목)
2	새만금 국제마라톤 수산물 직거래장터	‘24.4.14.	군산시 월명경기장	수산분야 12개소(30품목)
3	서울동행상회 농수산물 직거래장터	‘24.10.17.~10.18. (2일)	서울동행상회 (안국역 일원)	수산분야 5개소(30품목)
4	수산물 직거래장터 (박물관일원)	‘24.11.1.~11.2. (2일)	군산시 박물관(차없는거리)	수산분야 16개소(50품목)
5	농수산물 국회 홍보 기획전 개최	‘24.11.8.	서울시 국회 의사당	수산분야 15개소(50품목)

□ 향후계획

○ 2025년 수산물 직거래 장터 개최 계획 : 6개행사 추진

연번	행사명	기 간	장 소	참가규모	비고
1	새만금 국제마라톤 직거래장터	‘25. 4. 6.	군산시 월명경기장	14개소	완료
2	서울 동행상회 수산물 직거래장터	‘25.5.19.~5.20. (2일간)	서울 안국역 일원	4개소	완료
3	서울 삼삼마켓 수산물 직거래장터	‘25.6.21.~6.22. (2일간)	경기도 고양시	12개소	완료
4	전북도 수산물 직거래장터(하반기)	‘25.9.19.~9.20.	전북도청 (서편광장)	20개소	예정
5	김천시 농수산물 교류 행사	‘25. 10월경	김천시(종합운동장)	10개소	예정
6	서울 국회 수산물 직거래장터	‘25. 11월경	여의도 국회의사당	15개소	예정

사업명

수산물 소비촉진 활성화 지원사업

(수산물 온누리상품권 환급행사)

담당자

수산산업과 강성준(☎454-5734)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류로 수산물 소비둔화에 대응하여 지역경제 활성화 추진, 소외된 상점가와 전통시장의 공생을 위한 상생방안 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 (1년)

○ 위 치 : 군산시 내항2길 216(수산물종합센터 일대)

○ 규 모 : 수산물 온누리상품권 환급행사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2024년	2025년 이후
계	130	0	130	0	0
시 도 비	39	-	39	-	-
시군구비	91	-	91	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 수산물 온누리상품권 환급행사 추진          : 2024. 9. 5. ~ 9. 8.

- 참여점포 : 114점포(센터 98, 해신상가16)

- 환급품목 : 국내산 수산물, 젓갈류 등 가공식품(국내산 원물 70% 이상)

- 환급금액 : 구매금액의 최대 30% 환급(1인 2만원 한도)

□ 향후계획

○ 수산물 소비촉진 활성화 지원사업 추진(직거래, 할인비용, 택배비 등)

○ 수산물 소비촉진을 위한 신규사업 발굴 및 대책 수립

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군경합동묘지 안장묘역 확장사업

담당자

복지정책과 박철언(☎454-3064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가유공자(6.25참전자 등) 대부분이 고령으로 매년 안장 수요 증가 추세

○ 만장 예측에 따른 안장 수급 대응 방안 검토 필요

○ 이에, 군경합동묘지 확장을 통해 수요에 대응하고 국가유공자들의 충의(忠義)와 위훈(偉勳)의 정신을 기리며 선양(宣揚)하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ～ 2025년 4월   ※2024년 12월 완공

○ 위 치 : 군산시 나운동 산175 일원

○ 규 모 : (현재) 7,523㎡, 999기→ (예정) 23,151㎡, 1,929기 (증 15,628㎡, 930기)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,935백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,935	286	2,649	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,935	286	2,649	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 토공(절토, 성도, 흙은반 등), 옹벽시공(보강토, L형)

○ 차폐식재, 일부 배수로 설치

□ 향후계획

○ 군경합동묘지 안장묘역 확장사업 준공, 국가 유공자 안장 재개

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군산시 승화원 제4추모관(봉안당) 신축

담당자

경로장애인과

이동건(☎454-7952)

김준수(☎454-3192)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 장례문화 인식변화 및 화장 납골에 대한 수요증가로 추모관의 증설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01 ~ 2024. 04

○ 위 치 : 군산시 임피면 보석리 452-23 외 1

○ 규 모 : 연면적 4,671㎡(지상4층), 철근콘크리트조, 묘지관련시설(봉안당)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,552백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,552	9,670	882	-
국 비	3,775	3,775	-	-
시 도 비	768	768	-	-
시군구비	6,009	5,127	882	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 설계용역 공고 및 입찰(조달청 의뢰) -2회유찰           : ‘19. 05.

○ 설계용역 2회 유찰로 설계용역 자체발주 추진             : ‘20. 02.

○ 건축허가(증축)협의 절차 이행                           : ‘21. 05.

○ 건축시공업체 선정 및 착공                              : ‘21. 07.

○ 1차분 건축공사 준공(1층 골조)                          : ‘22. 09.

○ 2차분 공사 계약 및 착공                                : ‘22. 10.

○ 전기, 통신, 소방 사업완료 및 동절기 공사중지            : ‘23. 12.

○ 신축공사 완료                                          : ‘24. 04.

○ 추모4관 개관 및 운영                                   : ‘24. 08.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

생활SOC복합화 군산시가족센터 건립

담당자

여성가족청소년과

전혜인(☎454-3252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존의 가족센터 공간 협소로 가족상담, 부모교육, 다문화 교류 소통 등

다양한 가족의 욕구 반영이 어려움

○ 공동육아나눔터 설치로 아이돌봄 서비스 시설 집적화하여 지역 중심의

보편적 돌봄 서비스 제공을 위한 중추적 역할 수행

○ 생활SOC복합화 사업으로 지역주민의 생활문화 참여기회 확대 및 문화적

활동공간 확충

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 1 ~ 2025. 8.

○ 위    치 : 군산시 경암동 577-1 일원

○ 규    모 : 부지면적 2,023㎡ / 연면적 2,096㎡(지하 1층, 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,045백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,045	642	3,707	3,696
국 비	1,800	300	1,274	226
시 도 비	900	117	137	646
시군구비	5,345	225	2,296	2,824
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

○ 생활SOC복합화사업 사업 선정(여성가족부)                  : ‘20. 9.

○ 가족센터 건립 집단 컨설팅 참여(한국건강가정진흥원)        : ‘21. 4.

○ 가족센터 건립 부지 변경 논의 및 의회 간담회	: ‘21. 7.

○ 부지변경 중앙부처 승인(여가부, 문체부)	: ‘22. 3.

○ 설계용역 착수	: ‘22. 11.

○ 가족센터 건립 현장 컨설팅(한국건강가정진흥원)             : ‘22. 11.

○ 설계 용역 준공	: ‘23. 11.

○ 일상감사 및 원가심사	: ‘23. 12.

○ 건축공사 착공	: ‘24. 2.

□ 향후계획

○ 공사 준공                                                  : ‘25. 8.

○ 가족센터 이전                                              : ‘25. 9.

사업명

청소년수련관 기능보강사업

담당자

여성가족청소년과 김혜림(☎063)454-3243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내구연한 경과한 기계설비 교체 필요(노후화에 따른 소방펌프 오작동 등)

○ 시설 노후화로 우천시 내‧외벽 옥상 등 누수발생

○ 콘크리트 옹벽 침하, 균열 철근 노출 및 부식등으로 안전사고 노출

○ 수련동 숙소 노후화 및 객식 부족에 따른 리모델링 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 6.

○ 위 치 : 청소년회관로 75(송풍동)

○ 규 모 : 본관동(지하1층, 지상7층), 수련동(지하1층, 지상3층), 연면적 11,311㎡

○ 사업내용 : 누수 및 균열 보수, 노후 기계설비 교체, 석면철거, 숙소 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,058백만원                                 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,840	1,506	1,380	1,954
국 비
시 도 비	913	731	182
시군구비	3,927	775	1,198	1,954
지 방 채
민간자본
기 타

※ 불용액 218백만원(도 87, 시 131)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 추가예산 확보 계획                                   : ‘22. 11.

○ 지방재정 투자 재심사                                 : ‘22. 11.

○ 설계용역 완료                                        : ‘22. 11.

○ 추가 예산 확보_30억                                  : ‘23. 3.

○ 1차 공사 준공                                        : ‘23. 9.

○ 2차 공사 계획 및 설계용역 실시                       : ‘23. 11.

○ 2차 공사 설계용역 완료                               : ‘24. 6.

○ 시공업체 선정 및 공사 착공 등                        : ‘24. 7.

□ 향후계획

○ 공사 준공                                            : ‘25. 6.

사업명

군산 상상도서관 건립

담당자

도서관관리과 이효정(☎454-5626)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산시 서남부지역의 생활soc확충으로 지역주민 생활편의 및 지식정보 요구 해소를 위한 공공도서관 조성으로 시민의 문화향유 기회 제공 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027

○ 위 치 : 군산시 지곡동 일원(도시공원 예정지내)

○ 규 모 : 연면적 4,000㎡ 공공도서관(1개소) 조성

- 지하1층 지상3층 규모

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	17,430	55	0	0	17,375
국 비
시 도 비	6,552	0	0	0	6,552
시군구비	10,878	55	0	0	10,823

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 예산협의 및 도서관 건립계획 수립                        : ‘23.1월

○ 의회 간담회(도서관 건립계획 보고)                       : ‘23.2월

○ 전북도 지방재정투사심사 완료(조건부 추진)               : ‘23.8월

○ 지곡동 주거지역 내 정주여건 조성 협조 요청도시계획과        : ‘23. 11월

○ 제260회 군산시의회 제2차 정례회 의원 5분발언 검토보고  : ‘24. 1월

○ 지곡동 일원 도시공원 예정지 내 도서관 건립 협의산림녹지과     : ‘24. 2월

○ 건축기획용역 발주 및 관계부서 회의                      : ‘24. 5월

○ 공약사업명 변경                                         : ‘24. 5월

- (당초)은파호수공원 어린이상상도서관, (변경)군산 상상도서관

○ 2024년 정기3차 지방재정투자심사 재심사 신청            : ‘24. 7월

○ 군산 상상도서관 건립 건축기획용역 1차 보고회           : ‘24. 8월

○ 의회 간담회 추진(건축기획용역 보고)                    : ‘24. 8월

○ 2024년 정기3차 지방재정투자심사 완료(조건부추진)      : ‘24. 10월

○ 도서관 건립 관련 시민 의견 설문조사 실시       : ‘24. 12월~‘25. 1월

○ 설문조사 결과보고                                      : ‘25. 2월

○ 공유재산심의회                                         : ‘25. 4월

○ 공유재산관리계획동의안 상정시의회 →부결                 : ‘25. 6월

□ 향후계획

○ 사업추진 방향에 대한 의회 협의 및 사업부지 확정   : ‘25. 하반기~

○ 사전행정절차 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업부지 변경

- (당초) 군산시 나운동 191-5/24~27번지

- (변경) 군산시 지곡동 345-1번지 일원(지곡동 도시공원 예정지내)

○ 사업명 변경

- (당초) 은파호수상상도서관 건립

- (변경) 군산상상도서관 건립

※ 변경사유 : 지곡동 일원으로 건립 예정지 범위를 확대하여 추진함에 따라 공약사업과 사업내용의 불일치로 인한 혼동 방지

○ 사업규모 변경

- (당초) 지상4층 규모, (변경)지상3층 규모

사업명

청암산 에코라운드 조성사업

담당자

기후환경과 이소연(☎454-4252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 자연환경을 활용한 생태관광 활성화

○ 생태관광 수요 증가에 따른 종합계획 추진 및 생태관광지 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2024년

○ 위 치 : 청암산 및 군산호수 일대

○ 규 모 : 생태계 보전·복원, 생태관광 인프라 구축사업 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,200	4,582	259	338	-
국 비	1,800	1,146	65	85	-
시 도 비	3,600	2,290	129	168	-
시군구비	1,800	1,146	65	85	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2016년

- 주민설명회 및 마스터플랜 용역 수립, 꼬마숲 놀이마당, 청암 원앙길 조성        (데크 360m/안전시설 및 쉼터), 공중화장실 신축 등

○ 2017년

- 청암산 입구 생태주차장 조성(잔디블럭 3,507㎡ 시공), 힐링 편백숲 조성

- 생태연못 및 관찰데크, 대나무숲 생태학습장 조성, 수변 탐방로 환경개선 등

○ 2018년

- 육화습지 복원 및 생태학습장 조성, 조류관찰대, 전망쉼터, 등산로 정비 등

○ 2019~2020년

- 생태관광지 내 전선 지중화 추진

○ 2021년

- 수변산책로 꽃길 조성사업(진달래 등 야생화 약 1㎞), 청암산 수변탐방로 정비사업

- 청암산 제방변 경관 조성사업(잔디광장 조성 약 2,000㎡)

○ 2022년

- 청암산 자연생태체험형 쉘터 제작·설치 등

○ 2023년

- 청암산 제방 식생 환경정비사업, 식생 안내판 및 수목 표찰 설치 등

- 청암산 생태학습장 용수공급시설 설치 및 식생정비 사업

○ 2024년

- 청암산 수변산책로 야외화장실 신축(34㎡)

- 청암산 야생차밭 서식지 환경정비 공사(제초 및 잡목 제거)

□ 향후계획

○ 청암산 제방변 환경정비 공사

○ 꼬마숲 어린이 놀이마당 노후 시설물 철거 및 교체

사업명

월명공원 조성을 위한 사유토지 매입

담당자

산림녹지과 박종찬(☎454-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 20. 7월 장기미집행 도시계획시설 일몰제 도래에 따른 대응

○ 장기미집행 도시계획시설(월명공원)의 사유토지 전략적 매입으로 실효시설

최소화 및 미래유산인 도심 속 녹지공간 최대 확보

□ 사업개요

○ 기   간 : 2020. 6. ~ 2027. 6.

○ 위   치 : 월명공원(군산시 해망동, 소룡동 일원)

○ 규   모 : 공원 내 사유토지 492천㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	28,000	13,927	2,722	6,330	5,021
국 비
시 도 비
시군구비	28,000	13,927	2,722	6,330	5,021
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 59.5%)

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역                : ‘19. 5. ~ ‘20. 10.

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 공원구역계 조정                                 : ‘19. 5. ~ ‘20. 6.

○ 공원존치지역 실시계획인가 고시                  : ‘20. 6.

○ 공원 내 사유토지 협의 매입시행                  : ‘20. 7. ~

○ 공원 사유토지 보상사업 기간연장                 : ‘25. 5.

□ 향후계획

○ 실시계획인가 변경 및 수용재결 추진

사업명

군봉공원 조성을 위한 사유토지 매입

담당자

산림녹지과 박종찬(☎454-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 20. 7월 장기미집행 도시계획시설 일몰제 도래에 따른 대응

○ 장기미집행 도시계획시설(군봉공원)의 사유토지 전략적 매입으로 실효시설

최소화 및 미래유산인 도심 속 녹지공간 최대 확보

□ 사업개요

○ 기   간 : 2020. 6. ~ 2027. 6.

○ 위   치 : 군봉공원(군산시 개정동, 구암동 일원)

○ 규   모 : 공원 내 사유토지 410천㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	27,000	13,435	2,420	6,006	5,139
국 비
시 도 비
시군구비	27,000	13,435	2,420	6,006	5,139
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 58.7%)

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역                : ‘19. 5. ~ ‘20. 10.

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 공원구역계 조정                                 : ‘19. 5. ~ ‘20. 6.

○ 공원존치지역 실시계획인가 고시                  : ‘20. 6.

○ 공원 내 사유토지 협의 매입시행                  : ‘20. 7. ~

○ 공원 사유토지 보상사업 기간연장                 : ‘25. 5.

□ 향후계획

○ 실시계획인가 변경 및 수용재결 추진

사업명

공원 사유토지 매입

담당자

산림녹지과 박종찬(☎454-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설 일몰제 도래에 따른 대응

○ 장기미집행 도시계획시설(금강·새들·통매·지곡·은파공원)의 사유토지 전략적 매입으로 실효시설 최소화 및 미래유산인 도심 속 녹지공간 최대 확보

□ 사업개요

○ 기   간 : 2018. 1. ~ 2025. 6.

○ 위   치 : 공원 5개소(군산시 내흥동, 수송동, 지곡동, 조촌동 일원)

○ 규   모 : 공원 내 사유토지 158천㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  41,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	41,000	18,438	10,047	10,515	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	41,000	18,438	10,047	10,515	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 69.5%)

○ 공원 내 필수지역 우선매입                        : ‘18. 1. ~

- 등산로, 공원시설 사용부지, 재해위험지, 국공유지 밀집지역 등

○ 공원구역계 조정                                  : ‘19. 5. ~ ‘20. 6.

○ 공원존치지역 실시계획인가 고시                   : ‘20. 6.

○ 공원 내 사유토지 협의 매입시행                   : ‘20. 7. ~

○ 실시계획인가 및 사유토지 보상사업 기간 연장      : ‘25. 5.

□ 향후계획

○ 장기미집행 공원 사유토지 수용재결 추진           : ‘25. 7. ~ 12.

사업명

군산 철길숲 조성사업

담당자

산림녹지과 고지현(☎454-2952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 내·외곽 산림(숲)의 신선하고 깨끗한 공기를 도심으로 유도·확산할 수 있도록 숲 네트워크 조성

○ 폐철도, 유휴지 등을 이용한 시민 친화숲 조성을 통한 미세먼지 저감, 열섬       완화 등 도시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.(4년)

○ 위 치 : 군산시 전역

○ 규 모 : 철길숲(5.7ha, 연장 2.6km) 외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	20,000	1,454	11,010	7,536
국 비	10,000	954	7,999	1,047
시 도 비
시군구비	10,000	500	3,011	6,489
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 철길숲 1차(8구간) 준공                       : ‘23. 11. ~ ‘24. 11.

○ 철길숲 2차(1·2구간) 준공                     : ‘23. 12. ~ ‘24. 11.

○ 철길숲 3차(3·4구간) 착공                     : ‘24.  4. ~

○ 철길숲 4차(5·6·7구간) 착공                   : ‘24.  6. ~

□ 향후계획

○ 군산 철길숲 조성사업 추진                     : ‘23. 11. ~ ‘25. 11.

○ 철길숲 외 바람길숲 조성사업 추진              : ‘24.  3. ~ ‘25. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군산시 성산면 산곡지구 농촌공간정비사업

담당자

농업정책과 황대원(☎454-5892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌공간계획 기반 농촌 공간 재구조화*에 필요한 정비대상 시설의

정비 및 정주환경개선 사업을 지원하여 농촌공간의 재생을 도모하기

위하여 농식품부에서 추진하는 농촌지역개발사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2028(5개년)

○ 위 치 : 성산면 산곡리 227번지 일원

○ 규 모 : A=47,635㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	13,400		670	5,326.5	7,403.5
국 비	6,700		335	670	5,695
시 도 비	2,010		100.5	201	1,708.5
시군구비	4,690		234.5	4,455.5	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

○ `24년 농촌공간정비사업 공모 선정(`24.4.)

○ 재정투자심사/공유재산관리 절차 추진(`24.8.)

○ 농촌공간정비사업 기본계획 수립용역 착수(`24.10.)

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물 보상, 소유권 이전(`25.2.)

○ 기본계획 관련 농림부 및 전문가 현장 컨설팅(`25.4.)

○ 기본계획 수립 및 농식품부 승인

○ 기초용역 실시설계 용역 등 사업 착수, 농촌공간정비사업 완료

사업명

군산 수제맥주&블루스 페스티벌

담당자

먹거리정책과 이선우(☎454-5252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 대표 수제맥주 도시브랜드 창출 및 로컬 복합문화컨텐츠로 육성

○ 지역농업‧청년창업‧도시재생을 연계한 지역특산 주류 산업화

○ 로컬맥주 붐 조성을 통한 군산맥아 판로 확대 및 인지도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 6. 21.(금)~6. 23.(일) / 3일간

○ 위 치 : 군산 근대역사박물관 주차장 일원

○ 규 모 : 약 24,800명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	1,935	465	490	480	500
국 비
시 도 비
시군구비	1,935	465	490	480	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 참가규모: 61개 업체 및 기관·단체

○ 방문인원: 24,800명 ※전년(19,700명) 대비 26% 증가

□ 향후계획

○ 군산만의 독창적인 글로컬한 로컬 수제맥주 축제로 지속 추진

○ 지역 소상공인 및 기업 참여 확대로 산업축제 동반성장 역할 강화

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군산 꽁당보리축제

담당자

농촌지원과 김희성(☎454-5233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산 대표 농업축제로서 군산농업의 우수성과 문화를 알리고 도시민들과
함께 공유하고 즐길 수 있는 축제 개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 5. 2.(목) ~ 5. 4.(토) (3일)

○ 위 치 : 미성동행정복지센터(공항로 371) 주변 보리밭

○ 규 모 : 축제장 12.3ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 136백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	136	68	68	108	150
시군구비	136	68	68	108	150

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 축제 기본 계획 수립 : 2024. 1.

○ 축제 세부 계획 수립 : 2024. 3.

○ 축제 추진 완료 : 2024. 5.

○ 보조금 정산 : 2024. 7.

□ 향후계획

○ 25년도 축제 예산 수립 : 2024. 9.

○ 25년도 축제 기본계획 수립 : 2024. 12.